아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 계약변경 의뢰(남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 실시설계용역)

1. 한양도성도감-12299(2017.12.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행 중인 「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 실시설계용역」에 대하여 아래와 같이 계약 변경을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 실시설계용역

나. 계약업체 : 협동원건축사사무소외 1(대표자 이민아)

다. 계약금액 : 금이억팔천사백사십구만원(￦284,490,000원)

라. 용역기간 : 2017.6.12. ~ 2017.12.12.

마. 변경사항 : 과업추가에 따른 계약금액‧기간 변경

구분	당 초	변 경
계약금액	금이억팔천사백사십구만원(￦284,490,000원)	금이억구천팔백오십구만오천원(￦298,595,000원)
용역기간	2017.6.12. ~ 2017.12.12.	2017.6.12. ~ 2018.6.12.

붙임  1. 관련 방침 1부.

2. 변경설계서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	한양도성도감과장
주무관	정윤모		도성관리팀장	곽동진		한양도성도감과장	12/04 심말숙
협조자	계약1팀장	조현
시행	한양도성도감-12340	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	jym66@seoul.go.kr	/	대시민공개