의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-25512
결재일자	2017.12.5.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		광역도로과장	토목부장	시설국장		결재
김성권		진재섭	김영수	12/05 류훈
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 1767번, 이정훈 의원, 교육위원회)

사가정길∼암사동간도로 개설 및 암사대교 건설현황(강동구 암사동 ∼ 경기도 구리시 아천동):세부집행내역 포함제출과 관련하여 이정훈 시의원 요구자료를 아래와 같이 제출합니다.

붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

이정훈 의원(교육위원회, 더블어민주당)

□ 요구번호 1767

1. 사가정길∼암사동간 도로개설 및 암사대교 건설현황(강동구 암사동∼ 경기도 구리시 아천동)

- 세부집행내역 포함 제출

1. 사가정길∼암사동간 도로개설 및 암사대교 건설현황

- 사가정길∼암사동간 도로개설은 암사대교 건설공사, 연결도로건설공사 및  민자사업으로 시행한 용마터널 건설공사를 포함한 예산편성명 입니다.

2. 암사대교 건설현황

1) 공사개요

- 위    치 : 강동구 암사동 ∼ 경기도 구리시 아천동

- 규    모 : 교량건설, 폭24∼44m(4∼6차로),연장1.13㎞ 램프2개소(아천IC,암사IC),접속도로 2개소

- 공사기간 : 2006. 4. ∼ 2016.12.15.

- 총공사비 : 422,688,402천원

- 시 공 사 : 현대건설(주)

- 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링, 제일종합건축사사무소

2) 추진경위 및 계획

- ’98.12.24. : 광역도로 지정

- ’01.01.22. : 사가정 ∼ 암사동간 도로건설 추진방안 방침 수립

- ’03.09.30. : 기본설계 완료(2001.06. ∼ 2003.9.)

- ’05.09.15. : 실시설계 완료(2003.12. ∼ 2005.9.)

- ’06.03.23. : 공사 계약(1차) (총공사 1800일, 준공예정일 2011.3.10.)

- ’08.12.22. : 아천IC 교통광장 및 도로 (구리시 고시 제2008-56호)

- ’09.02.19. : 접속도로(중로3-1호선 및 3-26호선) (구리시 고시 제2009-7호)

- ’13.08.21. : 접속도로(소로3-1호선 및 3-17호선) (구리시 고시 제2013-80호)

- ’06.07.27. : 암사 IC 교통광장 및 도로 (서울시 고시 제 2006-257호)

- ’14.09.14. : 토지 등 보상 완료(토지 140필지. 122,770㎡)

- ’14.11.20. : 임시 개통(교량 본선 및 암사IC, 아천IC 일부)

- ’15.06.26. : 전 구간 개통 완료

- ’16.12.15. : 공사준공

3) 암사대교건설 공사비 세부집행 내역

- 총 사 업 비 : 430,627,402천원

▹시  설  비 : 422,688,402천원

[설계비 7,463,000, 보상비 133,157,000, 공사비 282,022,000, 관급비 46,402]

▹감  리  비 : 7,463,000천원

▹시설부대비 : 476,000천원

3. 구리암사대교 연결도로 건설공사 현황

1) 공사개요

- 위    치 : 강동구 암사동 암사IC ∼ 고덕로 훈련원사거리

- 규    모 : 도로개설 B=31.5m(6차로), L=1.88㎞

- 공사기간 : 2012. 8. ∼ 2015.12.22.

- 시 공 사 : 현대건설(주)

- 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링, 제일종합건축사사무소

2) 추진경위 및 계획

- ’04.04.21. : 제2차 수도권광역교통5개년계획 사업추진 확정

- ’11.11.01. : 실시설계 완료(4차로→5차로)

- ’12.04.05. : 실시계획 인가

- ’12.08.02. : 공사착공

- ’14.01.17. : 문화재 발굴조사 완료

- ’14.11.20. : 임시개통

- ’15.12.22. : 공사준공

3) 암사대교 연결도로 공사비 세부집행 내역

- 총 사 업 비 : 75,251,000천원

▹공  사  비 : 75,251,000천원( 공사비 23,348,000,  보상비 51,903,000)

▹감  리  비 : 암사대교 통합시행

작성자	기 관 명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토목부)	담당사무관	진재섭
	☎ 3708-2557	주무관	김성권
	작 성 일 : 2017. 12. 5.