＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 및 차수별 금액변경 시행〔2017년 전기시설물 유지보수 2차 공사〕

1. 우리 사업소에서 시행중인 『2017년 전기시설물 유지보수 2차공사』 건에 대하여 아래와      같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 계약건명 : 2017년 전기시설물 유지보수 2차 공사(장기계속단가)

나. 계약업체 : 대양전기건설공사  대표  이재철

다. 계약기간 : 2017.7.14~2018.3.31

라. 설계변경 내용 : 작업지시에 대한 전 공정 시공완료후 공사물량 집행액 증가 및

4대 보험 문서 미 제출로 공사비 최종 설계변경 정산.

마. 설계변경 내역

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증 액(원)	비 고
총계약금액	52,233,789	56,675,000	4,441,211	증액 처리

바. 계약금액 변경사유 : 전기공사 과업 수행에 대한 1,2,3차 작업지시 결과 배수지∙가압                          장의 전기시설물 보수 및 교체 공정이 정상적으로 시공완료됨에                          따라 공사물량 집행액 증가되고 계약업체의 4대 보험 일부 가                         입문서 미 제출에 따른 공사비의 최종 설계변경 정산.

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(가압장.배수지 기전설비 유지보수)

붙 임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 심의결과 보고서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의서 1부.  끝

주무관	신인철		기전팀장	김충완		시설관리과장	허준행		중부수도사업소장	12/05 유경애
협조자	주무관	김유리나		행정관리팀장	김태수
시행	시설관리과-37339	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가,중부수도사업소)	/
전화	02-3146-2226	/전송	02-3146-2239	/	richstar7964@seoul.go.kr	/	부분공개(7)