투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청[성내교(구교) 내진보강공사)

우리 사업소에서 시행하고 있는『성내교(구교) 내진보강공사』와 관련 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 현황

1) 공 사 명 : 성내교(구교) 내진보강공사

2) 계약업체 : ㈜윈도우종합건설  대표 이상경

3) 준공기한

당초 : 2017. 12. 10.

변경 : 2017. 12. 26.

4) 연기사유 : 자재수급 불균형 및 추석 연휴에 따른 공사 지연으로 인한

준공기한 연기

5) 지체상금 부과여부 : 미 부과.

붙임 : 준공기한 연기 보고서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	김부호		시설보수과장	12/05 김환겸
협조자	주무관	나철흠
시행	시설보수과-8864	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0371	/전송	02-2040-0308	/	jam747@seoul.go.kr	/	대시민공개