문서번호	시설과-3826
결재일자	2017.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	송복식	진병규	12/05 이용태
협 조
	주무관		김영균

「2017 지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사」

실정사항(1차) 검토 보고

2017. 12

동부공원녹지사업소

(시설과)

「2017 지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사」

실 정 사 항(1차) 검 토 보 고

우리사업소에서 추진 중인「2017지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사」와 관련하여 현장 실정 사항이 발생하여 아래와 같이 검토 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사(봉화 황평분교)

○ 공사기간 : 2017. 11. 2 ~ 12. 21

○ 총공사비 : 금278,978,160원(금이억칠천팔백구십칠만팔천일백육십원)

(도급액 : 금252,160,670원/ 관급자재 : 금26,817,490원)

○ 도 급 자

- 주계약자 : 주식회사 아이제이건설 대표 배석진

- 부계약자 : 주식회사 랜드콤프러스 대표 임공식

○ 공사내용 : 교사동, 화장실, 샤워실 리모델링, 야영데크, 편의시설 설치

□ 실정사항 보고

○ 주요 변경 내용

(단위 : 원)

공종	현황 및 문제점	검토 내용	비고
건축	▶ 현장여건상 구조보강 공사에 따른 노후 천장재 철거 및 설치 수량 변경	▷ 노후된 천장재 철거 및 설치 수량 변경 ·PVC천정재철거 : 20㎡→259.2㎡ ·열경화성수지천장재 : 56㎡→295.2㎡ ·강관 조립식 말비계: 0조→6조	4,873천원(증)
	▶ 배관 크기 및 수압 현장여건상 세척장 수도 연결 선로 변경	▷ 세척장 수도 선로 변경(수량 변동없음)
	▶ 석면 철거 전문 조사기관 검사 진행 요청	▷ 석면 철거 전문 조사기관 검사 ·석면조사비 : 0식→1식
	▶ 온수 보일러 도면과 내역서 상이에 따른 변경	▷ 도면에 맞춰 변경 ·전기온수기 : 4set→2set
	▶ 지붕 공사에 안전에 따른 고공 장비 요청	▷ 고공 장비 추가 ·스카이다이차 : 0일→1일
	▶ 캠핑장 간판 요청(교육정책과)	▷ 캠핑장 간판 추가 ·캠핑장 간판 : 0EA→1EA

공종	현황 및 문제점	검토 내용	비고
조경	▶텐트데크 8개 추가 설치 및 낙상사고 예방 데크 높이 낮춰 시공 요청(교육정책과)	▷ 텐트데크 8개 추가설치 ·레미콘 인력운반 타설 : 3㎥ → 5㎥ ·레미콘 : 3㎥ → 5㎥ ·합판거푸집 설치 및 해체:39㎡→65㎥ ·텐트평상설치(H450) : 12개소→0개소 ·텐트평상설치-1(H200) : 0개소→20개소 ·텐트데크명패 : 12개소→20개소 ▷ 8개 추가 설치 지역 토공사 ·터파기 : 148㎥ → 247㎥ ·토사운반 : 148㎥ → 247㎥	14,381천원(증)
	▶도면과 현장 여건 상이에 따른 변경 ▶유지관리 및 미관을 고려한 포장 변경	▷ 8개 추가 설치 지역 포장 추가 및 혼합골재 제외 ·쇄석포장(T200) : 1,480㎡ → 0㎡ ·쇄석포장(T100) : 0㎡ → 2,710㎡ ▷ U형측구 수량 변경 ·U형측구설치 : 20m→6m ▷스틸그레이팅 설계서 누락에 따른 반영 · 스틸그레이팅 : 0m→6m ▷ 현장여건 고려하여 데크 배치
관급	▶ 현장 여건을 고려하여 안내판 변경 ▶ 텐트데크 8개 추가(기반영)	▷ 안내판 변경 ·시설안내판 : 7개소→4개소 ·방향표지판 : 7개소→4개소 ·시설이용안내판 : 0개소→2개소 ▷ 데크 변경 ·데크 : 255㎡→425㎡	7,127천원(증)

□ 소요예산 내역(개략금액)

(단위 : 원)

구 분	소요 금액				비고
	당 초	변 경	증 / 감
총 공 사 비	278,978,160	312,570,490	증	33,592,330
공 급 가 액	229,236,972	248,520,998	-
부 가 가 치 세	22,923,698	25,329560	-
도 급 공 사 비	252,160,670	278,625,170	증	26,464,500
관급자재비	26,817,490	33,945,320	증	7,127,830

□ 예산검토

○ 예산집행 내역

(단위 : 원)

구분	공사비	공사비집행액				비고
		발주액 (a)	계약액 (b)	잔액 (c=a-b)	관급자재
가족자연 체험시설	313,200,990	286,383,500	252,160,670	34,222,830	26,817,490

‣ 예산과목

- 교육정책담당관, 학교지원 및 우수인재양성, 학교교육지원, 폐교를 활용한 가족자연          체험시설 조성 운영, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□ 검토의견

○ 상기 각 항목별 실정보고 사항에 대하여 공사 시행하고 추후 설계 변경 시행

○ 실정보고에 따른 관급자재 변경 및 본공사 일정에 맞춰 관급자재 납품기한 변경 요청(→공원운영과)

붙  임 : 변경내역서 1부. 끝.