문서번호	시설보수과-8861
결재일자	2017.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
김부호		김환겸	12/05 송만규
협조
	주무관		나철흠

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

성내교(구교) 내진보강공사 준공기한 연기보고

2017. 11.

동부도로사업소

(시설보수과)

성내교(구교) 내진보강공사 준공기한 연기보고

우리 사업소에서 시행중인『성내교(구교) 내진보강공사』와 관련 아래와 같은 사유로 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

1		공사현황

❍ 공 사 명 : 성내교(구교) 내진보강공사

❍ 공사기간 : 2017. 08. 08 ~ 12. 10

❍ 공사개요 : 교량받침 인상 80개소, 교량받침 교체 80개소

❍ 도 급 액 : 322,618,200원

❍ 도 급 자 : ㈜윈도우종합건설  대표 이상경

2		연기사유

❍  관급자재(교량받침) 납품 지연에 따른 공사기한 연기

- 최근 전국적인 내진보강공사 과다 수요에 따른 수급 불균형.

· 2017.07.13일 구매요청하여 11.23.일까지 납품기한으로

10.01납품 및 추석 연휴 휴무로 실 착공 지연 됨.

- 이에 따라 절대공기 부족한 실정임.

３		조치계획

❍  준공기한 연기

위와같은 사유로 준공기한을 연기하여 공사사행에 만전을 기하고자 함.

• 당초 준공기한 : 2017. 12. 10.

• 변경 준공기한 : 2017. 12. 26.

• 지체상금 부과여부 : 미 부과.   끝.