투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	『서울대공원 황새마을 시설개선 기계설비공사』 설계변경 시행

1. 시설과-7701호(‘17. 12. 4.)와 관련입니다

2. 대공원 『서울대공원 황새마을 시설개선 기계설비공사』에 대해 아래와 같이 설계변경코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울대공원 황새마을 시설개선 기계설비공사

나. 공사금액 : ********************************

다. 공사기간 : 2017. 10. 17. ~ 12. 30.

라. 시 공 자 : 자연엔지니어링(주) 대표 김순영

마. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감	비 고
도급금액	***********	***********	************
공사기간	‘17. 10. 17. ~ 12. 30.	‘17. 10. 17. ~ ’18. 03. 31.	증 91일간	사고이월

바. 설계변경 사유 : 장비 및 물량 변경에 따른 설계변경

사. 예산과목 : 공원이용시민만족도향상, 동물사관리기능및야생동물종보전, 공원안전시설보수및정비, 시설비

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 공사갑지 1부.

3. 설계변경 내역서 및 도면 각 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

주무관	박도원		주무관	조대복		시설과장	오임석		관리부장	12/05 박진순
협조자	주무관	정한성		총무과장	代강준민		전략기획실장	김정열
시행	시설과-7730	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7423	/전송	02-507-7230	/		/	부분공개(7)