문서번호	건축부-20858
결재일자	2017.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		문화시설과장		건축부장
박윤수		최달수		12/05 代박범규
협 조

『체부동 생활문화센터 조성공사』

실정보고 검토결과 보고

2017.12.05.(금)

도시기반시설본부

(건축부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『체부동 생활문화센터 조성공사』

실정보고 검토결과 보고

본 공사의 추가공사 및 설계도서와 현장여건 차이로 인한 실정보고가  시공사로부터 접수되어 이를 검토하고 보고드림.

1		공사 개요

○ 공 사 명 : 체부동 생활문화센터 조성공사

○ 위    치 : 종로구 체부동 자하문로 1나길 3-2외 2필지

○ 규    모 : 지상1층, 연면적 353.26㎡

○ 공사금액 : 605,000,000원

○ 공사기간 : `17.05.31 ~ `17.12.31.

○ 시 공 자 : ㈜하웅종합건설

○ 감리자(설계자) : 지요건축사사무소

2		추진 경위

○ `17.05.31. : 공사 착수

○ `17.07.27. : 트러스관련 구조안전 검토의견 제출(윤구조기술사사무소)

○ `17.11.30. : 실정보고 검토의견서 제출

○ `17.12월 현재 : 교회 및 한옥 마감공사 중

3		관련 근거

○ `17.11.22. : 지요-체부동-17-11

○ `17.11.22. : 하웅17-81호

○ `17.11.22. : 건축부-13043

4		실정보고 검토내용

□ 변경 공사 금액

○ 주요 변경내용 및 사유 : 물량증가 및 신규품목(직접공사비 기준 : 증23,067,369원)

연번	공종	변경내용	공사금액 (단위 : 원)				비고(사유)
			전	후	증감
1	가설공사	****************************	***********	***********	*	**************
		*******************************	********	**********		**********
2	철골공사	*************** ************************************	*******	*******	*	********
		************** *************************************	**********	********	*	***********
		****************************	********	********	*	********
		****************************	**	**********	*	**********	신규품목
		********** ***********************	********	**********	*	**********
		************** ************************************	**********	**********	*	*********
		*************** ************************************	********	********	*	********
		******************* ************************************	********	********	*	********
3	철근콘크리트 공사	************************ ******************	*******	*********	*	********	추가물량
4	조적공사	********************	**********	**********	*	**********	신규품목
		********* *******************************	********	********		********
		****************** ********************************	********	**********		**********
		****************** ************************************	**********	**********		**********
		************* **********************************	********	**********		********
5	목공사 및 수장공사	*********************	**********	**********	*	**********	신규품목
		***************************	**********	********	*	**********
		*******************************	**********	**	*	***********
6	지붕 및 홈통공사	**************** *********************	**********	**********	*	**********
7	금속공사	*****************************	********	**	*	*********
		*************** ******************	********	********		********
8	기타공사	**************** ************************	**********	**********	*	**********
		************* **************************	**********	**********	*	**********
		******** ************************	**********	**********	*	**********
		************** *************************	**********	**********	*	*********
9	꽃담보존처리		*	**********	*	**********	견적처리 (간접비 제외)
소계			**********	**********	*	**********	직접공사비 기준

□ 도급금액(일반관리비, 이윤, 보험료 및 제잡비 등 포함)

도급금액 (계)	***********	***********	**	**********

□ 단가 적용기준

○ 관련기준 : 공사계약 일반조건 제7절, 계약상대자 요구

- 기존 비목 단가(물량 증감) : 계약단가 적용

- 신규비목 단가 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가 × 낙찰률(86.7008%) 적용

→ 93.3504%

5		감리자 의견

○ 실정보고 사항에 대해 검토한 결과, 적용 단가 및 수량, 비목 관련 근거가 적정하게 산출되었다고 사료 됨

6		검토 의견

○ 감리자 검토의견에 따라 승인토록하고 또한, 현장에 즉시 반영하여 시공토록 조치시키며 이에 관해서는 추후에 설계변경 처리코자 함.

붙 임 : 실정보고 서류(감리검토 의견서 포함) 1부.  끝.