투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 구매물량 변경요청(남부도로사업소 제설전진기지 조성공사)

1. 서울시설공단 공사감독1처-9409(2017.12.04.)호 및 건축부-20737(2017.12.01.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행 중인 「남부도로사업소 제설전진기지 조성공사」 추진과 관련하여 공사에 소요되는 자재에 대하여 물량변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사

나. 품 목 명 : 레미콘, 철근

다. 변경사유 : 공사시행 중 현장여건 반영한 물량증가

라. 변경내용

납 품 요구번호	품 명	규격	단위	물량변경		증감	납품기한	비고
				당초	변경
12-17-1-68199-00	레미콘	25-24-150	㎥	902	1,063	161	2018.3.30	증)
	레미콘	25-18-80	㎥	259	262	3	2018.3.330	증)
12-17-1-68125-00	철근	H13	톤	18.753	20.363	1.61	2018.3.30	증)
	철근	H16	톤	62.42	63.42	1	2018.3.30	증)

끝.

	방재시설부장
주무관	정호운		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	12/05 남궁용
협조자	경리과장	최정수
시행	방재시설부-20604	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화		/전송		/		/	대시민공개