투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지하철9호선3단계 시스템감리단 책임감리원
(경유)
제목	설계변경 자문회의 결과통보 및 업무지시

1. 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 정보통신공사 설계변경 자문회의 결과를 통보하니   설계변경시 반영하기 바라며,

2. 아울러 선행공정 준공기한 미도래(‘18.12)에 따른  준공기한을 아래와 같이 연기조치 하시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기

공 사 명	변경 전	변경 후	비 고
9호선3단계 정보통신공사(1,2구간)	‘14.12.31 ~‘18.1.11	‘14.12.31 ~‘18.12.30	1구간 : 총차, 3차 2구간 : 총차

- 사 유 : 선행공정 준공기한 미도래(‘18.12)로 인한  현장시공여건 미비

첨  부 : 1. 자문회의 지적사항 조치결과 제출양식 1부.

2. 자문회의 결과. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	배종수		정보통신과장	추경수		도시철도설비부장	12/05 代김영수
협조자
시행	도시철도설비부-14537	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7320	/전송	772-7308	/	baejs@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)