문서번호	건축부-20827
결재일자	2017.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
양수지		차무흥	12/05 代박범규
협 조

『시립노원청소년직업체험센터 신축공사』

석면 추가발생에 따른 처리계획

2017. 12.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『시립노원청소년직업체험센터 신축공사』

석면 추가발생에 따른 처리계획

임목폐기물 처리작업중 수목 아래에 묻혀있던 지정폐기물(석면)이 추가 발생됨에 따라 관련 법규정에 의한 처리계획(조사 및 농도 측정용역, 지정폐기물 처리용역)을 수립하여 추진에 만전을 기하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 시립노원청소년직업체험센터 추가 석면조사, 농도측정 및 처리운반 용역

○ 용역내용

- 위    치 : 노원구 하계동 224-9외 3

- 규    모 : *********************************

- 용 역 비 : ***********

- 용역범위 : 시립노원청소년직업체험센터 부지내 수목을 제거한 토사부분에 대한 석면 조사, 농도측정 및 처리·운반용역

- 용역기간 : 착수일로부터 15일

□ 용역 발주계획

○ 발주 및 계약방법

- 입찰방법 : 수의계약

▷ 지방자체단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호

▷ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제5장 수의계약 운영요령

▷「여성기업 지원에 관한 법률」제 2조제1호

※여성기업과 계약을 체결하는 경우 5천만원이하 1인견적 수의계약 가능

- 수의계약 사유

▷ 건축물 내 석면 조사, 농도 측정 및 지정폐기물 처리용역비가 소액이며 원활한 사업진행을 위하여 수의계약 처리하고자 함

- 수의계약 대상

▷ 석면 조사, 농도측정 및 지정폐기물 처리,운반 용역 : 1인 견적

○ 예산과목

- *****************************************************************************

□ 향후계획

○ ‘17. 12. 5 : 용역 계약의뢰 (→ 건설총괄부)

○ ‘17. 12. 7~ 8 : 용역계약 체결

○ ‘17. 12. 11~ 26 : 석면 처리

- 석면조사, 농도측정 및 처리운반

따로 붙임 : 1) 과업내용서 각 1부

2) 설계내역서 1부.  끝.