문서번호	시설과-7537
결재일자	2017.12.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
조경팀장		시설과장
이무림		12/05 김재균
협조
	재무팀장		김기중

『나들이공원 풋살경기장 조성사업 실시설계 용역』

설계변경 검토보고

2017. 12

중부공원녹지사업소

(시 설 과)

『나들이공원 풋살경기장 조성사업 실시설계 용역』

설계변경 검토보고

나들이공원 풋살경기정 조성사업이 도시공원심의에 부결됨에 따라 사업변경에 따른 실시설계용역 변경 검토보고임.

1		용 역 개 요

▢ 용 역 명 : 나들이공원 풋살경기장 조성사업 실시설계용역

▢ 용역개요 : 실시설계 1식

▢ 용역기간 : 2017.02.03. ∼ 2017.12.20

▢ 계약금액 : 20,900,000원

▢ ********************

2		변 경 내 용

▢ 변경물량

○ 변경기간(증 7월 17일)

- 당 초 : 2017. 2. 3 ~ 2017. 4. 23

- 변 경 : 2017. 2. 3 ~ 2017. 12. 20

○ 변경방식

- 당 초 : 공사비 요율에 의한 방식

- 변 경 : 실비정액 가산방식

▢ 변경금액

(단위:천원)

구 분		당 초	변 경	증‧감	비 고
용 역 비		20,900	35,800	(증) 14,900
도급비	공급가액	19,000	32,545	(증) 13,545
	부 가 세	1,900	3,255	(증) 1,355

▢ 변경사유

○ 시의원 발의사업으로 사업추진에 따른 국회의원 및 시의원 보고절차 이행과 주민의견에 수렴에 따른 기간 연장

○ 공원조성계획 변경절차 이행에 따른 추가업무와 사업변경 실시설계 도서작성 및 보고자료 작성 등 용역실비 증가

3		조 치 의 견

▢ 사업변경에 따른 용역 기간연장과 실시설계용역 도서작성, 공원조성계획변경 추가업무와 보고자료 작성 등 비용을 실비정액가산방식으로 설계변경코자 함.

붙임   1. 설계변경내역서 1부.

2. 사업변경 방침서 1부.  끝.