문서번호	생태공원과-3331
결재일자	2017.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
김태수		代장창수	12/05 문길동
협조

『한강이촌권역자연성회복사업 건설폐기물처리용역』

준공기한 연기보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12

공 원 부

『한강 이촌권역자연성회복사업 건설폐기물 처리용역』

준공기한 연기보고

우리부에서 시행중인『한강이촌권역 자연성회복사업 건설폐기물처리용역』 관련 감독부서로부터 준공기한 연기 요청에 대한 검토 보고임.

⇒ 서울시 시설관리공단 공사감독3처-11644(‘17.12.04)

공사개요

용 역 명 : 한강이촌권역 자연성회복사업 건설폐기물 처리용역

용 역 비 : 354,398,700원

용역기간 : 2016. 3.22 ~ 2017. 12.10

계 약 자 : 더블유아이케이환경(주)  대표이사 김기수

변경현황

기간변경

구 분	당 초	변 경	비고
용역기간	2016. 03. 22 ~ 2017. 12. 10	2016. 03. 22 ~ 2017. 12. 27

변경사유 : 본 공사인 한강이촌권역 자연성회복사업 준공기한이 2017.12.19.로 원활한 공사진행을 위하여 후속공정인 건설폐기물 처리용역 준공기한 연기 불가피 함.

지체상금부과여부 : 미부과

예산과목

한강공원이용 및 생태환경 개선, 한강 자연성 회복, 이촌권역자연성회복,

시설비(100-401-01)

조치의견

시설관리공단 보고대로 승인하고 준공기한 연기조치.

붙임 : 관련 문서 각 1부. 끝.