문서번호	급수운영과-28080
결재일자	2017.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		중부수도사업소장
최성태	유명수	유용일		12/05 유경애
협 조

설계변경(1차) 및 계약금액 조정시행 보고 (보광배수지(1,2지) 내부 방수방식공사)

2017. 12.

중부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

설계변경(1차) 및 계약금액 조정시행 보고

우리 사업소에서 시행중인『보광배수지(1,2지)내부 방수·방식 공사』와 관련하여 시공물량 증감 및 신규공정 발생 등으로 설계변경 및 계약금액 조정이 요구됨에 따라 본부에 설계변경 심의를 요청하여 예산집행의 효율성 및 적정한 공사 예산집행을 도모 하고자 함.

1		공사현황

○ 공 사 명 : 보광배수지(1,2지) 내부 방수방식공사

○ 공사개요

- 패널식 방수·방식 2,930㎡, 도막식 방수·방식 9,793.8㎡

- 단면보수 920㎡, 폼타이제거 단면보수 7,000개

○ 공사기간 : 2017.08.28. ~ 2018.05.26.

○ 계약업체 : 우제이건설(주) 대표 김주연

○ 도 급 비 : 897,012,760원

○ 감 리 사 :(주) 이준엔지니어링  대표 나석근(건설사업기술관리자 이종수)

2		보고내용

○ 설계변경 사유 : 시공물량 증·감 및 신규공종 발생에 따른 변경

(관련근거 이준중부 1708-111,112(‘17.11.24)호와 관련임)

- 시공물량 증·감 현황

1. 보광배수지 1지 물량 증·감발생

물량증가 공종 : 그라인딩(콘크리트+페인트면) 등 3개 공종

물량감소 공종 : 도막식 방수·방식 등 6개 공종

2. 보광배수지 2지물량 증·감발생(배수지1지와 동일구조물로 물량 증·감 예상되어 설계변경에 반영)

물량증가 공종 : 그라인딩(콘크리트+페인트면) 등 3개 공종

물량감소 공종 : 도막식 방수·방식 등 6개 공종

3. 부대공 물량 증·감발생

물량감소 공종 : 자재인양구 설치 해체 1개 공종

- 신규공종 발생현황

신규공종 : 타일철거 등 2개 공종

- 제비율 적용 변경 : 당초 추정가격 5~30억미만 적용(5.5%)해야 하나 5억미만으로 적용(6.0%)

일반관리비 : 6% → 5.5%

○ 계약금액 변경(조정) 내역 : (증) 20%

구 분	당 초	변 경	비 고(증,감)
총공사비	1,421,368,760	1,601,356,000	179,987,240
도 급 비	897,012,760	1,077,000,000	179,987,240
관급자재비	524,356,000	524,356,000	-

○ 공종별 변경내역

구 분	당 초	변 경	비 고(증,감)
보수보강공사	568,109,326	685,040,788	116,931,462
부 대 공	19,070,037	7,915,083	-11,154,954
제비율 제외공종	9,630,862	13,613,812	3,982,950

3		계약금액 증액 사유

설계시 도류벽 1개소 누락으로 그라인딩, 고압수세정 등 시공물량 증가발생 및 폼타이제거 단면보수 시공물량 증가, 신공정 발생 등 배수지 1지 물량 증가발생과 배수지 2지 경우 배수지 1지와 동일구조물로 1지와 동일하게 시공 물량증가가 예상되어 설계변경 반영에 따른 도급비 증액

4		조치의견

○ 공사시행 중 물량 증·감이 발생되어 물량증가 공종에 대하여는 계약단가를 적용하고 신규공종에 대하여는 설계단가에 낙찰율(86.7489%)을 적용하였으며,

○ 상기와 같이『보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사』의 도급비 증액사항으로 설계변경 및 계약금액 조정사항이 발생되어 상수도사업본부 재무회계과에 계약금액 조정검토 의뢰 한 후 변경계약 시행 및 의뢰 하고자 합니다.

붙 임 :  1. 현장실정보고서 각 1부

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 수량산출서 1부.

4. 신규공종 일위대가 1부.

5. 설계변경 요청(시공사) 1부.   끝.