투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 승인 알림(폐기물 추가-경춘선 3단계))

1.업무지시현장 :  경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계) 주식회사 선진엔지니어링종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2017-12-06 09:12:36

3.지 시 내 용:

가. 선진경춘감-17-557(2017.12.04.)호와 관련입니다.

나. 「경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)」폐기물 추가 관련 실정보고 건에 대하여	건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 승인 통보하니 향후 설계	변경에 반영하여 주시기 바라며, 폐기물처리 시 실물량으로 계근하여 정산처리한	결과를 반영하시기 바랍니다.  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							김자환			공원시설과장					김인숙					방재시설부장					12/06 남궁용
협조자
시행			방재시설부-20759									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부															/
전화		02-3708-8683						/전송			02-3708-8756					/	2015060246@seoul.go.kr												/	대시민공개