문서번호	도시철도설비부-14655
결재일자	2017.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	송변전과장	도시철도설비부장
이재복	김영수	12/06 구자훈

『 지하철9호선 연장건설(3단계)2구간 송변전공사 』

현장여건에 따른 물량증감 실정보고 검토

2017. 12.

도시철도설비부

지하철9호선 연장건설(3단계) 2구간 송변전공사

현장여건에 따른 물량증감 실정 보고 검토

지하철 9호선 연장건설(3단계) 2구간 송변전공사 시행중 수전선로 굴착 및 케이블 포설작업(주간→야간) 현장 시공여건 변화 등에 따른 시공물량 증감 검토 보고임

▷ 관련근거 : 서지9-3시감 제17-780호(2017.12.5)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 2구간 송변전 공사

○ 공사기간 : `15. 09. 02 ~ `18. 02. 17 (2차 - ‘16. 9. 1~`17. 12. 31)

○ 계약금액 : 총 4,703,036,098원 (2차 : 3,232,736,098원)

○ 계 약 자 : (주) 삼진일렉스 대표 김성관

○ 공사규모 : 변전소(938)1개소, 수전선로 3.35Km, 연락송배전선로 3.96Km

□ 실정보고내용

○ 수전선로 공사시 교통정체 및 민원발생을 고려한 야간작업 필요 및 한전 전력구내 설계 미반영 소화장치 설치비용 등 추가비용 발생

○ 송배전선로 공사 2구간 공구경계 변경

○ 설계 미반영 된 변전기기간 제어케이블 포설비용, 정류기설비의 소화기 및 단말처리비용, ESS 면수 감소로 인한 변전실 콘크리트 타설 비용 등 증가

□ 변경내역

[단위: 천원]

구 분	당 초	변 경	증 감
총 합계	2,795,100	3,004,440	209,340(증)
수전선로	917,010	999,530	82,520(증)
- 수전관로 굴착(야간)	206,480	232,720	26,240(증)
- 한전관로 임대구간 및 관로 터파기구간 야간작업	710,530	744,360	33,830(증)
- 한전전력구 소화장치 및 수전선로 공사 경비	-	22,450	22,450(증)
송배전설비공사	1,802,850	1,857,000	54,150(증)
- 송배전선로 공사구간 변경	1,756,100	1,802,830	46,730(증)
- 핸드홀 규격 및 수량 변경	46,750	54,170	7,420(증)
변전설비공사	75,240	147,910	72,670(증)
- 변전소내(변전기기간)제어케이블	-	33,910	33,910(증)
- 변전실 장비 소화기 설치	-	13,990	13,990(증)
- 변전실기기간단말처리(고압)	75,240	95,420	20,180(증)
- 변전실장비 바닥 콘크리트 타설 및 치핑작업	-	4,590	4,590(증)

□ 검토결과

○ 한전임대 매설관로구간 케이블포설 및 관로 굴착구간 구간은 교통정체 및 민원발생, 사고위험 등을 고려하여 야간작업으로 작업안전 확보

○ 송배전선로 공사경계구간 이동 및 938S1환기구 위치 연장 등에 따른 케이블, 트로프 등 수량 조정

○ 설계 누락된 변전실내 기기간 제어케이블, 소화기, 종단접속재 등 오류사항 반영

□ 조치계획

○ 상기 검토된 사항에 대하여 시공에 우선 반영하도록 책임감리원에 통보하고, 추후 설계변경(정산) 시행하고자 함.

따로붙임: 감리원 실정보고 자료 1부.  끝.