문서번호	시설보수과-8759
결재일자	2017.12.6.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
윤정		윤승범	12/06 이인근
협조

「탈취기 부품교체 및 부속장치 제작설치 」

설계변경 계획 보고

2017.  12.  5.

중랑물재생센터

(시설보수과)

「탈취기 부품교체 및 부속장치 제작설치」

설계변경 계획 보고

‘2처리장 탈취기 부품교체 및 부속장치 제작설치’ 중 물량 증·감이 발생되어 준공처리 전 설계변경을 시행하고자 함

Ⅰ		계약개요 및 추진경위

계약개요

❍ 건      명 : 중랑물재생센터 제2처리장 탈취기 부품교체 및 부속장치 제작설치

❍ 계약상대자 : 주식회사 그레넥스

❍ 계 약 금 액 : 94,726,650원

❍ 계 약 기 간 : `17. 11.22 ~ `18. 1. 1.

추진경위

❍ 계약상대자 설계변경 요청 (′17.12. 5.)

- 이유 : 담체제거 중 기존 내역서에 반영 된 ‘담체제거 및 노즐청소비용’이 수지타산이 맞지 않음 / 폐기물처리비용 감소

▶ 물량조정을 통한 계약금액 변경 없는 계약내역 변경요청

※ 그간 경과

☞ `17.11.27. : 착수계 제출

☞ `17.11. 28. ~`17.12. 4. : 담체 제거 및 노즐 청소

☞ `17.12. 5. : 탈취기 2대 내부 폴링 설치

Ⅱ		설계변경 내용 (계약상대자 요청사항)

변경내용 및 변경사유

비 목	기존내용	변경내용	변경사유
담체제거 및 노즐청소	○ 수 량 : 106㎥ ○ 단가적용 기준 - 물탱크청소	○ 수량:56㎥ ○ 단자적용기준 - 인력터 파기	○ 실제 발생량 적용 ○ 단가적용은 담체가 토사화 되어 인력터파기 (고사점토 및 자갈 섞인 토사)적용
폐기물처리비	○ 수 량 : 48톤 ○ 단가적용 기준 - 혼합폐기물	○ 수량: 75톤 ○ 단가적용 기준 - 건설폐재류 (토사)	○ 실제 배출량 적용 ○ 혼합 건설폐기물에서 건설폐재류로 변경
폐기물운반	○ 처리장 - 김포매립지 55km	○ 처리장 - 고양시 내유동 43km	○ 김포 매립지에서 고양시 내유동에 위치한 업체로 변경 적용

변경금액

(단위 : 원)

비 목	기존내용	변경내용	증·감금액
담체 및 노즐청소	○ 단가 : 3,078 ○ 수량 : 106㎥ ○ 금액 : 326,268	○ 단가 : 86,720 ○ 수량 : 56㎥ ○ 금액 : 4,575,415 - 감 280,905원	4,249,147
건설폐재류	○ 단가 : 98,000 ○ 수량 : 48톤 ○ 금액 : 4,674,600	○ 단가 : 27,214 ○ 수량 : 75톤 ○ 금액 : 2,041,050	△2,633,550
폐기물처리 (상차비)	○ 단가 : 3,005 ○ 수량 : 48톤 ○ 금액 : 143,338	○ 단가 : 1,545 ○ 수량 : 75톤 ○ 금액 : 115,875	△27,463
폐기물운반	○ 단가 : 57,409 ○ 수량 : 48톤 ○ 금액 : 2,738,409	○ 단가 : 261,825 ○ 수량 : 75톤 ○ 금액 : 1,150,275	△1,588,134
증 또는 감 금액 계			0

Ⅱ		설계변경 검토

기존 담체제거 및 노즐청소 비용

○ 담체가 토사 화되어 작업의 난이도가 높아졌고 작업시간 또한 상당기간 소요되어 기존 단순 ‘물탱크 청소’품에서 → ‘인력 터파기’ 품으로 변경이 적정 내지 필요 (계약상대자에게 정당한 대가 지급)

폐기물처리 비용

○ 계약내용에는 정산에 관한 사항이 없으나 계약상대자가 실제로 처리한 비용을 정산하는 것이므로 적정 (우리센터 이익)

종합의견

○ 예상치 못한 사정변경 (담체의 토사 화)로 ‘담체제거 및 노즐청소 비용’ 및  ‘폐기물처리비’는  증·감이 발생되었고,

- 그 변경의 내용이 타당하고 계약금액 변경 없으므로 계약상대자에게 설계변경을 승인처리하고 함

Ⅲ		조치계획

계약상대자 : 설계변경 승인 처리 (`17.12.6.까지)

관  리  과 : 계약변경 요청 (`17.12.6.까지)

붙임  1. 현장 작업사진 1부.

2. 설계변경내역서  1부.

3. 합의각서 1부.  끝.