문서번호	방재시설부-20741
결재일자	2017.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	환경시설과장	방재시설부장		시설국장
박계현	代조양연	남궁용		12/06 代이상국
협 조
	주무관		김소연

『양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(2차)』 발주계획 검토 보고

2017. 12

도시기반시설본부

방재시설부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사』

발주계획 검토 보고(2차)

『양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사』와 관련 ‘17년 예산 배정에 따른 2차 발주계획에 대해 검토 보고 드림. ※ ㈜경동엔지니어링 경동 제2017-2142호(‘17.12.05)

1		공사 개요

○ 공 사 명 : 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사

○ 공사구간 : 서울시 영등포구 국회대로 22길 20 (양평1 유수지 내)

○ 공사규모 : CSOs 저류조 설치 (Q=46,000㎥), 건축 및 조경 1식

○ 도 급 비 : 총차 : 18,645,676천원(2차 : 5,762,702천원)

○ 공사기간 : 총차 → ‘16.12.05~‘19.08.04

2 차 →  착공일로부터 ’18.12.20.까지

○ 시 공 사 : ㈜대우산업개발 외 2개사

○ 감 리 사 : ㈜경동엔지니어링 외 3개사

2		′17년 예산 현황

(단위 : 천원)
구 분	‘17년 예산현액	‘17본 예산	‘16년 명시이월	비 고
합 계	16,178,929	9,200,000	6,978,929
시설비	15,065,000	8,493,000	6,572,000
감리비	1,083,929	677,000	406,929
시설부대비	30,000	30,000

○ 예산과목 : 물순환안전국 물순환정책과, 깨긋한 물관리, 물환경개선 및 관리,  양평1유수지 CSOs 저류조 설치, 시설비 및 부대비

3		발주 계획(2차)

○ 공사기간 : 착공일로부터 2018.12.20.일까지

○ 발주금액 : 금5,762,702천원

(단위 : 천원)
구 분	전 체	1차(준공예정)	2차(금회발주)	장래	비 고
계약금액 (금액비율)	18,645,676 (100.0%)	8,061,013 (43.2%)	5,762,702 (30.9%)	4,821,961 (25.9%)
공사기간	2016.12.05.~ 2019.08.04	2016.12.05.~ 2017.12.20	착공일~ 2018.12.20	2018.12.21.~ 2019.08.04

○ 분야별 공사비 발주 현황

(단위 : 백만원)
구 분		전 체	기발주(1차)	금회(2차)	장래	비 고
토목공사	토 공	1,477	1,275	106	96
	구조물공	4,517	742	2,655	1,120
	배관공	10			10
	포장공	2			2
	가시설공	3,944	3,179	702	63
	부대공	390	163	71	156
	사급자재대	92	2		90
	계	10,432	5,361	3,534	1,537
건축공사		554			554
조경공사		654	65		589
직접공사비		11,640	5,426	3,534	2,680
간접공사비		7,006	2,635	2,229	2,142
도급금액		18,646	8,061	5,763	4,822

○ 분야별 공종 및 물량

(단위 : 백만원)
구 분	공종 및 수량	금 액	비 고
도급금액		5,763
토공	- 구조물터파기 : 9,000m³ - 되메우기 : 1,541m³ - 사토처리 : 5,870m³	106
구조물공	- 철근콘크리트타설 : 10,671m³ - 유로폼 : 10,910m² - 시스템동바리 : 39,972공m³ - 철근가공조립 : 1,992ton - 지압형영구앵커 : 132공	2,655
가시설공	- Sheet Pile사용료 : 716ton - WALE공 : 110본	702
부대공	- 시멘트운반 : 12,279포 - 품질관리활동비 : 12개월	71
직접공사비계		3,534
간접공사비		2,229

4		책임기술자 검토의견

○ 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사의 2차공사 발주계획 내용을 검토한 결과 2017년 예산배정에 따라 발주계획을 검토하였으며,

○ 시공사에서 제출한 2차공사 발주설계서, 수량산출서, 공정계획이 적정하게 작성된 것으로 판단됨.

5		조치계획

○ 책임건설사업관리용역사인 ㈜경동엔지니어링에서 요청한 바와 같이 2차분 공사를 발주(계약의뢰)하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

구분	용역기간	계약금액(원)	비 고
2차	착공일로부터 ~‘18.12.20	5,762,702,000

붙임 : 2차공사 발주요청 공문(의견서 및 설계내역서 포함) 1부.  끝.