＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	중부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사실정보고 검토결과 통보

1. 공사감독2처-14956(2017.12.04.)호와 관련입니다

2. 위호와 관련 귀 공단에서 위탁감독중인 “한남테니스장~동국대입구역 송배수관 정비공사”에 대한 공사실정 보고서를 검토하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 공사진행에 차질이 없도록 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 보고내용 및 검토의견

서울시설공단 실정 보고	사업소 검토의견
1. 일부구간 구간내 지장물로 인해 하월 시공 가. 현황 및 문제점 - 구간 내 8개소에서 지장물로 인해 하월시공 - 하월에 따른 굴착폭과 심도 조정이 불가피 함 - 개략공사비 : 증)14,000천원	1. 검토결과 : 타당함 - 실 시공량을 근거 사진을 확보하여 설계변경시 반영하고 - 암발생구간에 대하여 파쇄 작업을 시행하여 공사 추진

끝.

	중부수도사업소장
★주무관	이상현		주무관	유명수		급수운영과장	전결 12/06 유용일
협조자
시행	급수운영과-28201	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)중부수도사업소 3층 급수운영과	/
전화	02-3146-2160	/전송	02-3146-2189	/		/	대시민공개