문서번호	설비부-20574
결재일자	2017.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김두환		유병기	12/06 권오식
협 조

- 밤고개로 확장 전기공사 -

공사기간(1차분) 연장 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

도시기반시설본부

설비부

- 밤고개로 확장 전기공사 -

공사기간(1차분) 연장 검토 보고

본 전기공사 진행중 도로확장 구간 토지 보상 지연으로 도로확장 구간의 가로등 이설작업 시기가 미도래하여 당초 계획한 전기공사 1차분 준공기한(‘17.12.31일)으로는 절대공기가 부족하기에 공사 기간을 다음과 같이 연장 조치하고자 검토 보고 드림.
		ㅊ
	ㅊ

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 밤고개로 확장 전기공사

□ 공사규모 : 도로확장(6→7~8차로), 연장 1,845㎞

가로등(LED100W)×155등, 가로등용 분전함×5면 설치

교통신호기 설치(이설)×1식

□ 공사기간 : 총차 `17.06.05.~`18.12.31.( 1차 `17.06.05.~`17.12.31.)

□ 도 급 비 : 총차 금515,442,521원(1차 금367,000,000원)

□ 계 약 자 : ㈜신화티앤에스 대표 이용철

□ 감 리 자 : 제일엔지니어링 종합건축사사무소

2		공사기간(1차분) 연장검토 내용

□ 관련근거

○ 전기 1차공사 공사 준공기한 연장 검토의견서 제출

: 밤고개로감 제2017-96호(2017.12.05.)

□ 공사기간 연장사유

○ 도로확장 구간 토지보상 지연에 따라 전기공사 1차분 공사구간인 1, 5구역 도로확장 구간 중 1구역 도로확장 구간의 가로등 이설작업 시기가 미도래하여 당초 1차분 준공기한(`17.12.31일)으로는 절대공기가 부족한 실정으로 전체 공사기간은 변경없이 1차분 준공기한을 연기조치하고자 함

- 공정율(토목 26%, 전기 4%) : 현재 2017.12월 기준

<공사 사진>

5구역(도로확장)	5구역(도로확장)

□ 공사기간 연장내용

구 분	당 초	변 경	비 고
전 체	2017.06.05.~2018.12.31	2017.06.05.~2018.12.31	변경없음
1 차	2017.06.05.~2017.12.31	2017.06.05.~2018.12.31	증365일

□ 귀 책 소 재 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ 지체상금부과여부 : 미부과

3		조 치 계 획

□ 본 전기공사의 당초 1차분 공사 준공기한을 `18.12.31.일까지 연기조치하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 1. 감리검토의견서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.