아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	서울새활용플라자 조경식재 유지관리용역 설계변경 시행(정산)

1. 자원순환과-40428(2017.12.05.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리과에서 시행하고 있는 “서울새활용플라자 조경식재 유지관리용역”에 대하여 설계변경(정산)을 아래와 같이 시행코자 하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울새활용플라자 조경식재 유지관리용역

나. 용역기간 : 2017.05.30.~12.31

다. 용역개요 : 서울새활용플라자 수목, 잔디, 초화류 유지관리

라. 도 급 자 : 수정조경개발㈜ 대표 *****

마. 변경사유 : 보험료 등 미집행에 따른 정산(감액) 설계변경

바. 변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	공급가액	10,301,800	10,000,000	301,800
	부 가 세	1,030,180	1,000,000	30,180
	계	11,331,980	11,000,000	331,980

사. 예산과목 : 자원순환과, 효율적인 폐기물관리, 생활폐기물 재활용 극대화(도시개발), 서울재사용플라자 조성(도시개발), 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙임 1. 방침서 1부.
2. 변경설계서 1부.
3. 합의각서 1부. 끝.

	자원순환과장
주무관	이경주		새활용플라자개관추진팀장	이대희		자원순환과장	12/06 최홍식
협조자	계약1팀장	조현
시행	자원순환과-20510	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 자원순환과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3694	/전송	02-2133-1026	/	zpzg@seoul.go.kr	/	부분공개(7)