투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(교량안전과장)
(경유)
제목	예산조정(편성목 변경) 요청(사천교 성능개선공사)

우리 사업소에서 시행중인 “사천교 성능개선공사” 추진과 관련하여 본공사 준공기한 연장에 따른 부족한 감리용역비 확보를 위하여 아래와 같이 예산조정(편성목 변경) 요청하오니 사업이 원활히 추진될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

나. 예산조정(편성목 변경) 내역(시설비→감리비)                    (단위:백만원)

구 분	2017년 예산			비 고
	당 초	변 경	증·감
계	2,717	2,717
시설비	2,317	2,209	감) 108
감리비	400	508	증) 108

다. 예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리(도시개발특별회계), 사천교 성능개선, 시설비및부대비, 시설비 / 감리비

붙임 : 1. 감리용역 부족예산 조치계획 보고 방침서 1부.

2. 용역 설계변경내역서 1부.

3. 공사 변경계약서 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	이동섭		주무관	代배종우		시설보수과장	12/06 신동헌
협조자
시행	시설보수과-10536	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	02-300-8374	/전송	02-300-8384	/	lds0420@seoul.go.kr	/	대시민공개