투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구) 용역변경계약서 용역기간 변경계약의뢰(총괄3회, 2차1회)

1. 도시철도사업부-12472(2017.11.28.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구)에 대한 물가변동 및 감리원 투입계획 조정으로  변경계약을 의뢰하여 계약하였으나, 2차1회분의 변경후   금차완수일자가 오류로 인하여 용역기간에 대하여 재 변경계약 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구)

나. 계 약 자 : ㈜유신 외 2개사

다. 용역기간                                                        (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총괄 (3회)	2011.11.01 ~ 2021.09.07	2011.11.01 ~ 2021.09.07	-계약기간:변경없음
1차	2011.11.01 ~ 2017.07.28	-	준공
2차 (1회)	2017.07.29 ~ 2018.03.19	2017.07.29 ~ 2018.04.12	-계약기간 : 증)24일 -계약금액 변경 없음

라. 용역금액 변경 없음.

마. 예산과목

- 신교통수단도입, 경전철 건설사업, 신림선 경전철 건설, 시설비 및 부대비, 감리비

(도시철도특별회계)

붙  임   1. 용역변경 계약서1부.

2.  합의각서 1부. 끝.

	도시철도사업부장
주무관	윤대희		경전철1과장	김형섭		도시철도사업부장	12/06 박동룡
협조자	주무관	위성환
시행	도시철도사업부-12794	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 9층 도시철도사업부	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7181	/전송	02-772-7305	/	cals97@seoul.go.kr	/	대시민공개