투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(해양관 외부방사장 그늘막 지붕폐기물 처리용역)

1. 시설과-7780호(2017.12.6)와 관련입니다.

2. 해양관 외부방사장 그늘막 지붕폐기물 처리용역에 대하여 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용역명 : 해양관 외부방사장 그늘막 지붕폐기물 처리용역

- 계약자 : **************

나. 용역기간 연기

변 경 전	변 경 후	비 고
2017. 11. 27.~2017. 12. 6	2017. 11. 27.~2017. 12. 15	9일 연기

다. 연기사유

- 해양관 외부방사장 그늘막 설치공사 변경에 따른 추가기간 소요

라. 지체상금 부과여부 : 미부과(귀책 : 서울대공원)

붙임 : 해양관 외부방사장 지정폐기물 처리용역 준공기한 연기 보고서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	김용주		시설과장	12/06 오임석
협조자	주무관	배진수
시행	시설과-7783	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02) 500-7411	/전송	02) 507-7230	/	kyjoo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)