문서번호	시설보수과-10535
결재일자	2017.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
이동섭		신동헌	12/06 배광환
협조
	주무관		代배종우

사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역

감리용역 부족예산 조치계획 보고

2017. 12

서부도로사업소

(시설보수과)

사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역

감리용역 부족예산 조치계획 보고

우리 사업소에서 시행중인 사천교(구교) 성능개선공사 공기연장 조치와 관련하여, 당해 건설사업관리용역 준공기한 연장을 위한 금년도 배정된 감리비가 부족함에 따라 통계목을 변경(시설비→감리비)하여 부족한 예산을 확보하고자 보고드림.

Ⅰ	용역개요

○ 용 역 명 : 사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역(장기계속)

○ 계약금액 : 672,424천원 (2차 : 305,689천원)

○ 용역기간 : 2016.4.1 ~ 2017.12.25 (2차:‘17.3.1~‘17.12.25)

○ 용 역 사 :  ㈜한국건설관리공사(60%), ㈜대한콘설탄트(40%)

○ 주요 추진경위

- ‘16.4.1~’17.2.28 : 감리용역(1차) 수행

- ‘17.3.1~현재 : 감리용역(2차) 수행중

- ‘17.11.17 : 사천교 성능개선공사 준공기한 연기 및 사고이월 결정

Ⅱ	사천교 성능개선 예산현황

○ 총사업비 : 3,703백만원                              (단위:백만원)

구 분		계	도급비	관급비	폐기물처리	집행잔액	감리비
총사업비		3,703	1,606	1,300	41	356	400
	2016년 (이월예산)	986	765	70	41	110	-
	2017년 (본예산)	2,717	841	1,230	-	246	400

※ 집행잔액은 낙찰차액 및 관급자재(PF거더 등) 계약 차액 등임.

Ⅲ	향후 건설사엄관리기술자 변경 투입계획

□ 운영 현황

○ 현재 책임건설사업관리기술자를 포함 2인으로 공사 전반(공정, 품질, 안전, 자재 등) 관리를 수행하고 있음

□ 건설사업관리기술자 연장 배치 사유

○ 본 공사 시행 중 성능개선구간 철거 후 존치되는 기존 교량의 바닥판에 심각한 손상이 발견되어 이를 보강하기 위한 도급공사의 공사기간이 연장됨에 따라 원활한 사업관리를 위한 감리원 배치기간 연장이 필요함

- 공사기간 연장(6개월) : 당초 ‘17.11.21 → 변경 ‘18.5.30

▸ 연장사유 : 기존교량 바닥판 손상부에 대한 외부전문가 현장 점검 자문 및 기술지원기술자(구조기술사)의 면밀한 검토 결과 추가 보강이 필요한 것으로 판단

□ 향후 건설사업관리 업무추진 계획

구 분		건설사업관리기술자 배치계획
년 월	주요공종	업무내용	배치계획
			당 초	변 경
‘18. 1월	-바닥판 손상부 철 거(상류측): 교통우회	-공정, 품질, 안전, 자재관리 -공사 검측, 시공 관리 -설계변경, 공무업무 -기성검사 업무 -현장점검 등 시공 관리 업무 -유관기관 협의 -민원사항 처리 -폐기물 관련업무	미반영	고급1인(토목) 초급1인(토목)
2월	- 상류측 바닥판 철근 보강, 레미콘 타설, 교면방수, 포장(1층)		미반영	고급1인(토목) 초급1인(토목)
3월	-바닥판 손상부 철 거(하류측): 교통우회		미반영	고급1인(토목) 초급1인(토목)
4월	-하류측 바닥판 철근 보강, 레미콘 타설, 교면방수, 포장(1층)		미반영	고급1인(토목) 초급1인(토목)
5월	-교면포장(2층) -신축이음장치 설치 -시설물 인수인계		미반영	고급1인(토목) 초급1인(토목)
		-공사준공 업무 -시설물 인계업무

□ 건설사업관리기술자 변경 투입 계획

(당초 / 변경)

구 분		분야	등급	2 차															개월	증.감
				2017년도										2018년도
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
상주기술자	책임 기술자	토목	고급																9.8
			고급																15.0	(증)5.2
	분야 기술자	토목	중급																4
			중급																4	-
			초급																5
			초급																10.2	(증)5.2

Ⅳ	조치계획

○ 건설사업관리기술자 연장 배치

- 잔여 공사기간 동안 시공품질 확보 및 안전관리 등 사업관리를 원활하게 추진하고자 건설사업관리기술자(토목2인) 배치기간 연장

건설사업관리기술자 현황					비고
분야	등급	당초	변경	증·감
토목 (1인)	고급	‘17.3.1~12.25 (9.8개월)	‘17.3.1~’18.5.30 (15.0개월)	증) 5.2개월
토목 (1인)	중급	‘17.3.1~6.30 (4.0개월)	‘17.3.1~6.30 (4.0개월)	-
	초급	‘17.7.26~12.30 (5.0개월)	‘17.7.26~’18.5.30 (10.2개월)	증) 5.2개월

○ 사업비 변경

- 부족예산(감리비)은 사업주관부서(교량안전과)와 협의하여 편성목을 변경(시설비→감리비)토록 요청하고 추후 설계변경 시 반영조치

- 감리원 투입 추가 소요예산 : 135백만원

· 감리비 예산 400백만원 중 집행잔액 27백만원으로 108백만원 예산 추가 확보가 필요하여,

· 시설비 예산 중 금년도 집행잔액 246백만원 중 108백만원을 감리비로 편성목 변경하여 부족예산 확보코자 함

(단위 : 백만원)

구 분	2017년도 예산		증.감	비 고
	당 초	변 경
소 계	2,717	2,717	-
시설비	2,317	2,209	감) 108
감리비	400	508	증) 108

※ 추후 설계변경하여 용역 계약기간 연장 조치 및 예산 사고이월 진행

붙임 1) 건설사업관리용역 설계변경 내역서 1부.

2) 공사 준공기한 연장 관련 검토보고 1부.

3) 공사 변경계약서 1부.  끝.