【별지 제1호서식】

공사 변경계약 심사요청서(암사탈수기)

부분공개(5)

시 행	기전설비과-9250
시행일자
수 신 자	재무회계과장
접수번호
접수일자

주무관		기전설비과장				결재
이상록		12/06 조성태
협 조

공 사 명	암사1정수장 탈수설비 개량 배관공사			요청기관		상수도사업본부 생산부
공사위치	암사정수센터 1정수장 탈수기동 (서울특별시 강동구 소재)
공사기간	2017.12.20.까지		계약방법				지역제한 경쟁입찰
공사금액	․최초계약금액 : 395,088,440원				․변경계약금액 : 488,022,020원 증)92,933,580원
예산내역	세부사업명	예산과목						예산(추산)잔액
	정수장시설 정비	자본적지출, 유형자산취득, 기계장치,시설비및부대비,시설비						284,206천원
계약 대상	․상 호 : 서전엔지니어링(주) ․ 대 표 자 : 유경하 ․전화 번호 : 02-557-0793
발 주 처	․담 당 자 : 이상록 (전화번호 : 02-3146-1335)
○ 주요 변경사항 - 기자재비 : 약품공급펌프용 전동기 6대 삭제, 슬러지공급펌프 엔코더 6대 추가 - 배관설치 ▪슬러지, 약품, 세척수 배관정비 ▪불용배관 철거 등 - 탈수기 주변 작업발판 물량 추가
○ 붙임 1. 설계변경 방침서 1부 2. 설계변경 관련자료(변경내역서, 수량산출서, 견적서, 도면) 각1부.

	기전설비과장

변경 내역서

(붙임 문서 참조)

끝.