문서번호	사회혁신담당관-14347
결재일자	2017.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		사회혁신담당관	서울혁신기획관
김남지		마채숙	12/06 전효관
협조
	공유도시팀장		임국현

공유허브 온오프라인 운영 용역

계약기간 연장계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

서울혁신기획관

(사회혁신담당관)

공유허브 온오프라인 운영 용역

계약기간 연장계획

새롭게 구축하는 공유허브 구축에 공유기업․단체 섹션 강화 등 기능 추가에 따라 서비스 개발 등이 지연되어 계약기간을 연장하고자 함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2017 공유허브 온오프라인 플랫폼 운영용역

○ 계약업체 : 주식회사 다날쏘시오(대표 이상무)

○ 계약금액 : 금263,000,000원(금이억육천삼백만원)

○ 계약기간 : 2017. 7.20.~ 2017.12.31.

○ 사업내용

- 공구대여소 등을 포함한 공유허브 플랫폼 전면 개편을 통한 공유허브의 기능 재정립(기존의 공유소식 제공 기능 뿐 아니라 관계기관 네트워킹, 캠페인, 자료·통계관리 등) 및 콘텐츠 축적, 이벤트 등으로 홍보 활성화

- 오프라인 모임 활성화 및 각종 정책 자료 축적

- 안정적이고 체계적인 시스템 운영으로 시민 편의 증대

□ 계약변경

○ 변경내용

계약금액	당초	금263,000,000원
	변경후	변경없음
	증감액	-
계약기간변경	당초	2017.07.20.~ 2017. 12. 31
	변경액	2017.07.20.~ 2018. 02. 28 ※ 사업기간 연장으로 사고이월 조치

- ’17. 12. 6. 현재 참여 인원(14)으로 사업종료시까지 수행

- 서울시 신규허브시스템 ’18. 2월 오픈예정, 구 사이트 3월 중 폐쇄

※ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 계약기간 연장 사유

- 시스템 구축을 위한 적정기간 산정위원회 개최 결과 신규구축시 최소 6개월의 시간이 소요된다고 산정된 바 있으며, 7월 말에 계약이 체결됨에 따라 현재까지 실제 구축에 4개월의 시간만 투입된 상황으로 공정일을 맞추기 위하여 추가 인력을 추가 투입(당초 12 ‣ 14)중이지만 시스템 구축을 위한 절대적인 시간이 부족

- 공구도서관 뿐 아니라 공공 자전거, 나눔카, 공공시설 개방공간, 공유기업 및 단체 위치정보 등 가능한 모든 정보를 통합한 지도서비스 구축, 오픈 클라우드 기반 공유기업 및 단체 소개 및 홍보페이지 구축 등 명실상부한 공유 종합 플랫폼으로서의 공유허브로 전면 재개편하기 위한 요구사항을 구체화하기 위하여 약 2개월 간의 기획검토기간을 거쳤으며, 이를 시스템으로 구현하기 위하여 계약기간 연장 필요

□ 향후 계획

○ 계약기간 연장 : ’17. 12월 (재무과)

○ 완료보고회 : ’17. 2월 초

○ 용역 준공  : ’18. 2월 중순

붙임 1. ㈜다날쏘시오 계약기간 연장 승인요청 공문 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 사업수행계획서 1부.

4. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.