문서번호	도로보수과-12899
결재일자	2017.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박성근		김권일	12/06 김용제
협조	주무관		천석기
	주무관		김경욱

2017년 교통사고 잦은곳 개선사업 작업완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12

강서도로사업소

(도로보수과)

2017년 교통사고 잦은곳 개선사업 작업완료 보고

□ 관련근거

○ 2017년 교통사고 잦은곳 개선사업 시행계획 검토보고

【도로보수과-7003호(‘17.7.5.)】

○ 17년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 설계변경 검토보고(제2회)

【도로보수과-9124호(‘17.8.29.)】

○ 교통사고 잦은곳 개선사업(양강중학교) 시행계획 검토보고

【도로보수과-11673호(‘17.11.3.)】

○ 17년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 설계변경 검토보고(제3회)

【도로보수과-12205호(‘17.11.20.)】

□ 사업개요

□ 2017년 교통사고 잦은곳 개선사업

○ 위    치 : 영등포구 영등포 교차로외 6개소

○ 사업기간 : 2017.10.17.~2017.12.03

○ 개선내용

- 노면표시 제거 및 도색(차선, 횡단보도, 정지선, 정차금지대 등)

- 무단횡단 금지시설 설치

- 그루빙 설치

- 시선유도봉 철거 및 설치

- 표지병 설치 및 제거

○ 사업비 : 126,900천원

○ 예산과목 : 도시교통본부(교통운영과), 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사고 잦은곳 개선, 시설비(401-01)

□ 2017년 교통사고 잦은곳 개선사업(양강중학교 앞)

○ 위    치 : 양천구 양강중학교 앞

○ 사업기간 : 2017.11.08.~2017.12.01

○ 개선내용

- 노면표시 제거 및 도색(차선, 문자·기호, 정지선, 유도선 등)

- 그루빙 설치

- 미끄럼방지시설(적색) 설치

○ 사업비 : 38,360천원

○ 예산과목 : “상동”

□ 작업완료 보고(정산)

□ 2017년 교통사고 잦은곳 개선사업

○ 노면표시

(단위 : 천원)

공 종	당 초				변 경				비 고
	총 공사비	도급비	관급비		총 공사비	도급비	관급비
			특수 페인트	솔라 표지병			특수 페인트	솔라 표지병
노면표시	79,448	53,713	17,642	8,093	65,834	42,654	15,090	8,090	감) 13,614

- 보고내용

1) 실시설계 내역서에 있는 시선유도봉 설치 및 철거 반영

2) “영등포구 영등포교차로” 작업구간 중 일부는 “노후포장도로정비공사(강서2구역)”에서 포장공사 후 노면작업을 완료하여 작업 제외(영등포 시장 방향)

3) “신정교 교차로” 노면작업중 주정차 금지대는 실시설계 내역상 물량과 현장작업 물량차이 발생(실시설계 내역 1,176m→ 작업내역 275m) ☞ 실시설계 과다 설계

4) “차로 밑그림” 선행 작업이 필요없는 구간에 대해서는 작업 제외(예산낭비 방지)

5) 작업구간별 현장여건에 따라 소소한 실측 물량 차이 발생

○ 시설물(그루빙 및 차선분리대 설치)

(단위 : 천원)

공 종	당 초			변 경			비 고
	총 공사비	이전비 (그루빙)	관급비 (차선분리대)	총 공사비	이전비 (그루빙)	관급비 (차선분리대)
그루빙, 차선분리대	36,402	22,938	13,464	27,028	17,618	9,410	감) 9,374

- 보고내용

1) 실시설계 내역서상 그루빙 설치를 “2017년 도로·교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)” 계약단가로 반영한 결과 단가 차이로 인한 예산 잔여금액 발생

2) 차선분리대 실시설계 내역상 물량과 현장작업 물량차이 발생

(실시설계 내역 144m→ 작업내역 96m) ☞ 실시설계 과다 설계

○ 정산금액

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	53,713천원	42,654천원	감) 11,059천원	배정금액 126,900천원
관급비 및 이전비	62,137천원	50,208천원	감) 11,929천원
총 공사비	115,850천원	92,862천원	감) 22,988천원

※ 당초 도급금액은 17년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 설계변경(제2회)시 적용한 노면표시 계약단가 금액임

□ 2017년 교통사고 잦은곳 개선사업(양강중학교 앞)

○ 노면표시

(단위 : 천원)

공 종	당 초				변 경				비 고
	총 공사비	도급비	관급비		총 공사비	도급비	관급비
			특수 페인트	미끄럼 방지포장			특수 페인트	미끄럼 방지포장
노면표시	6,900	2,339	348	4,213	6,237	1,708	316	4,213	감) 663

- 보고내용: 현장여건 변화에 의한 실측 물량 차이 발생

○ 시설물(그루빙 설치)

(단위 : 천원)

공 종	당 초		변 경		비 고
	총 공사비	이전비(그루빙)	총 공사비	이전비(그루빙)
그루빙, 차선분리대	30,939	30,939	16,827	16,827	감) 14,112

- 보고내용

1) 실시설계 내역서상 그루빙 설치를 “2017년 관내포장도로 긴급복구공사(연간단가)” 계약단가로 반영한 결과 단가 차이로 인한 예산 잔여금액과

2) 실시설계 내역서상 야간공사를 주간공사로 시행(예산낭비 방지)

○ 정산금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	2,339천원	1,708천원	감) 631천원	배정금액 39,360천원
관급비 및 이전비	35,500천원	21,356천원	감) 14,144천원
총 공사비	37,839천원	23,064천원	감) 14,775천원

※ 당초 도급금액은 17년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 설계변경(제3회)시 적용한 노면표시 계약단가 금액임

□ 검토결과 및 조치계획

○ 위 보고내용 같이 실시설계 내역서 계약단가(낙찰률) 적용, 현장여건변화 및 일부 물량 변경 등을 포함하여 적합하게 완료하였으며,

○ 공종별 공사금액을 기 계약된 연간단가(노면표시, 긴급복구, 도로·교통안전부속물)공사에 포함하여 추후 설계변경시 정산(관급자재 물량 조정 포함)처리코자 함

붙 임  1. 전체 및 공종별 작업 완료 내역서 각 1부.

2. 공종별 사진대지 1부.  끝.