문서번호	도시철도토목부-15767
결재일자	2017.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
이경훈		윤방식	12/06 김진팔
협조
	주무관		서재원

『하남선(5호선연장) 1-2공구 건설사업관리용역(총괄)』

건설사업관리용역 추가과업 시행에 따른 변경 검토보고

2017. 12.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선연장) 1-2공구 건설사업관리용역(총괄)』

건설사업관리용역 추가과업 시행에 따른 변경 검토보고

「하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」으로 시행 중인 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계 (보완)에 따른 건설사업관리기술용역 변경에 대해 검토한 보고 임.

※관련문서 : 도시철도토목부-7492(2017.09.14.)

1

용 역 개 요

❍ 용 역 명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

❍ 공사개요 : 연장 1,819m (본선 471m, 입출고선 1,348m)

❍ 용역금액 : 총괄) 2,024,114천원

❍ 계 약 자 : ㈜대한콘설탄트 이우정 외 2

❍ 용역금액 : 총괄) 2015.03.13. ~ 2018.08.08.

2

추 진 현 황

❍	'15.03.13.	:	총괄 및 1차 용역 계약
❍	'15.03.13.~'15.12.24.	:	1차 용역 시행
❍	'15.12.25.~'16.04.13.	:	2차 용역 시행
❍	'16.01.01.	:	물가변동 1회 (3.46%)
❍	'16.04.14.~'16.11.30.	:	3차 용역 시행
❍	'16.12.01.~	:	4차 용역 시행
❍	'17.01.01.	:	물가변동 2회 (3.79%)

3

변 경 내 용

❍ 하남선 1-2공구 건설공사 중 입출고선 공사와의 간섭으로 「고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)」시행에 따른 과업내용 및 계약금액 변경

【도시철도토목부-7492(20107.06.14)호와 관련】

- 고덕교 확장 및 고덕보고교 설치공사 실시설계(보완) 용역

․규    모 : 고덕교 연장 40m, 폭 20→21.2m(확장)

고덕보도교 1교) 연장 56m, 폭 4m (신설)

고덕보도교 2교) 연장 58m, 폭 4m (신설)

․사 업 비 : 20,000천원(VAT미포함)

4

조 치 계 획

❍ 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역에 대한 과업내용 및 계약금액을 아래와 같이 변경하고자 함.

❍ 변경 내용

- 계약금액 변경

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 (감)	비고
총괄 (3회)	계약금액	2,024,114	2,046,114	22,000
	기 간	2015.03.13.~ 2018.08.08	2015.03.13.~ 2018.08.08	변경없음

- 과업내용 변경

․하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리

․고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완) - 추가

- 예산과목

․도로건설, 광역도로건설(광역교통시설특별회계), 광역교통시설특별회계, 사가정길~암사동간도로개설(암사대교건설), 시설비

붙임 : 변경설계서(총괄3회) 1부.  끝.