투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	'호숫가전망좋은길 진입데크 설치공사' 설계변경 시행

1. 조경과-6979(2017.12.7.)호와 관련입니다.

2.『호숫가전망좋은길 진입데크 설치공사』 추진과 관련 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 호숫가전망좋은길 진입데크 설치공사

나. 공사내용 : 데크계단 1식, 안내판 2개 등

다. 공사기간 : 2017. 11. 13 ~ 2017. 12. 12

라. 총공사비 : 40,122,790원(도급액 35,320,600, 관급비 4,802,190)

마. 도 급 사 : 미류엘엔씨(주) 유희용, 윤형렬

바. 변경내역

구 분		금 액		증 감
		당 초	변 경
총공사비		40,122,790	42,996,840	2,874,050
도급액	공급가액	32,109,637	32,972,728	863,091
	부가가치세	3,210,963	3,297,272	86,309
	계	35,320,600	36,270,000	949,400
관급자재비		4,802,190	6,726,840	1,924,650

사. 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및

조경관리 강화, 산림내이용시설 정비 및 관리, 시설비

붙임  1. 설계변경 사유서 및 변경설계서 각 1부.

2. 방침서 1부(별첨).  끝.

주무관							김근주				조경과장					12/07 강인호
협조자				총무과장							代강준민
시행			조경과-6981										(						)		접수												(						)
우	13829					경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동) 서울대공원 조경과																/			http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		02-500-7550							/전송			02-500-7993					/	kimgj3950@seoul.go.kr													/	부분공개(6)