문서번호	조경과-6979
결재일자	2017.12.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	조경과장
김근주	12/07 강인호
협 조

「호숫가전망좋은길 진입데크 설치공사」

설계변경 시행 계획

2017. 11.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「호숫가전망좋은길 진입데크 설치공사」

설계변경 시행 계획

「호숫가전망좋은길 진입데크 설치공사」추진과 관련 현장여건에 따라   아래와 같이 검토하고 설계변경 시행하고자 함

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 호숫가전망좋은길 진입데크 설치공사

○ 공사기간 : 2017. 11. 13 ~ 12. 12

○ 공사내용 : 데크계단 1식, 안내판 2개 등

○ 도 급 액 : 금40,122,790원(도급비 35,320,600원 관급비 4,802,190원)

○ 도 급 자 : 미류엘엔씨 ㈜ 유희용, 윤형렬

Ⅱ		변경내용 검토

1) 관련근거

○「호숫가전망좋은길 진입데크 설치공사」실정사항 검토보고

(조경과 –6866(2017.12.4.))

2) 주요 변경내용

< 시설물 >

○ 데크계단 현장여건상 연장이 늘어나고 계단앞면, 측면 마감 등을 위해 목재물량 증가

□목재 : 당초 43㎡ → 변경 75.9㎡ (증32.9㎡)

○ 지형의 급경사로 인해 첫번째 계단참 조성이 어려워 안전한 보행로 확보를 위해 연접한 평지를 활용 계단참 조성

○ 데크설치후 출렁거림을 방지하기 위해 멍에와 장선 간격조절

□멍에 : 당초 750 → 변경 1500

□장선 : 당초 750 → 변경 500

○ 설치구간의 경사가 일정하지 않아 조립형 안전난간을 경사조절 가능한 난간으로 교체하고 견고한 기둥 고정을 위해 ㄷ자형 철판을 ㅁ자형으로 교체

○ 사면일부 절토로 인해 노출부분 목재마감으로 경관고려

< 철  거 >

○ 폐기물이 조경석과 자연목을 건조한 것으로 현장내 재활용

< 기  타 >

○ 보험료(건강, 연금, 노인요양) 및 건설기계대여대금지급보증서 정산감

○ 현장여건에 따른 실시공물량 설계반영 정산

- 컨테이너사무실 등

3) 변경물량 및 내역 : 붙임

4) 설계변경 금액 및 확보방안

○ 변경금액 : 공사비 낙찰 차액 활용

구 분		금 액		증 감
		당 초	변 경
총공사비		40,122,790	42,996,840	2,874,050
도급액	공급가액	32,109,637	32,972,728	863,091
	부가가치세	3,210,963	3,297,272	86,309
	계	35,320,600	36,270,000	949,400
관급자재비		4,802,190	6,726,840	1,924,650

○ 예산과목

- 서울대공원 총무과, 공원아용시민만족도 향상, 산림내이용시설 및 조경관리 강화, 산림내 이용시설 정비 및 관리, 시설비

Ⅲ		조 치 계 획

○ 위 보고한 바와 같이 본 공사에 대하여 설계변경 시행하고자 함.

붙임 : 변경설계서 및 보고서 각 1부.  끝.