투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(제1회, 2017년 최초침전지 보수공사)

우리센터에서 시행하고 있는 “2017년 최초침전지 보수공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 최초침전지 보수공사

나. 공사기간 : 2017.06.21. ~ 2017.12.23

다. 도급자 :  ㈜다전디자인그룹

라. 변경사유 : 보험료 실비 정산 및 치핑 방법 변경에 따른 공사비 감조정

마. 예산과목 : 난지물재생센터운영관리, 난지물재생센터운영관리, 공통분야 유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 공사비

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비		703,235,910	674,630,000	-28,605,910
도급비	공 급 가 액	639,305,373	613,300,000	-26,005,373
	부가 가치세	63,930,537	61,330,000	-2,600,537
	계	703,235,910	674,630,000	-28,605,910

붙  임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.   끝.

주무관	김승조		시설팀장	김재봉		시설보수과장	김일운		난지물재생센터소장	12/07 정흥순
협조자	주무관	김홍주
시행	시설보수과-4481	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 426 난지물재생센터 시설보수과	/
전화	02-300-8588	/전송	02-300-8587	/	ksjseoul@seoul.go.kr	/	대시민공개