국민의 나라 정의로운 대한민국
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	정릉동 청소년문화의집 신축 전기, 소방공사 설계변경 및 정산시행

우리구에서 추진중인 『정릉동 청소년문화의집 신축 전기, 소방공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 정산을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 정릉동 청소년문화의집 신축 전기, 소방공사

나. 위    치 : 성북구 정릉동 1031-2, 3

다. 도 급 자 : ㈜유일엔지니어링 대표 신우현

라. 도 급 비 : 금203,577,000원(1차 금47,973,000원, 2차 금155,604,000원)

마. 공사기간 : 2016. 07. 01. ~ 2017. 12. 10.

- 1 차 : 2016. 07. 01. ~ 2017. 07. 15.

- 2 차 : 2017. 07. 17. ~ 2017. 12. 10.

바. 설계변경(정산) 금액

○ 총차

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고(증 · 감)
총 공 사 비	259,485,000	251,157,860	감) -8,327,140
도 급 비	203,577,000	199,817,000	감) -3,760,000
관 급 비	46,351,000	45,895,860	감) -455,140
이 전 비	9,557,000	5,445,000	감) -4,112,000

○ 2차

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고(증 · 감)
총 공 사 비	211,512,000	203,184,860	감) -8,327,140
도 급 비	155,604,000	151,844,000	감) -3,760,000
관 급 비	46,351,000	45,895,860	감) -455,140
이 전 비	9,557,000	5,445,000	감) -4,112,000

사. 설계변경 사유 : 산업안전보건관리비 정산으로 인한 계약금액 변경

아. 예산과목 : 교육아동청소년담당관, 밝고 건전한 청소년 육성, 청소년 건전육성  및

활동지원, 성북청소년문화의집 운영, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 변경계약의뢰서 및 설계변경서 1부.

2. 제비율 검증확인서 1부.  끝.

주무관							홍기현				공공건축담당					신재경					건축과장					임철수					도시환경국장						12/07 최태규
협조자				주무관							김정호					아동청소년친화담당							전영훈					계약담당								이환규
교육아동청소년담당관							민지선				재무과장					김영임
시행			건축과-32804										(						)		접수												(						)
우	02848					서울특별시 성북구 보문로 168 (삼선동5가)																/			http://www.seongbuk.go.kr
전화		02-2241-2925							/전송			02-2241-6547					/	kibalss@sb.go.kr													/	부분공개(5)