아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	재단법인 세종문화회관사장
(경유)
제목	‘세종문화회관 블랙박스극장 조성사업’변경계약체결 안내

1. 세종문화회관 공간리노베이션TF팀-605(2017.12.04.)호와 관련입니다.

2. ‘세종문화회관 블랙박스극장 조성사업’ 과 관련하여 사업기간 연장에 따른 변경계약을 체결하고자 붙임과 같이 변경계약서를 송부하니 (재)세종문화회관 대표자 직인 날인 후 우리시(문화시설과장 참조)로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 계약기간 연장

구 분	당 초	연 장	비고
사업기한	2017. 12. 31.	2018. 7. 31.	7개월 연장

나. 협조사항 : 대행사업 기간이 연장됨에 따라 지하철 연결통로 설치공사 등 사업을 성실히 수행하시어 사업기간이 지연되지 않도록 추진에 만전을 기하여 주시기 바람

붙임  변경계약서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김권웅		문화시설총괄팀장	이정연		문화시설과장	전결 12/07 오희선
협조자
시행	문화시설과-10211	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 1동 12층	/
전화	2133-4216	/전송	2133-1443	/	gonoon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)