아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	2017 자전거이용도로 유지보수를 위한 기본 및 실시설계 용역 변경계약 의뢰

1. 자전거정책과-13537(2017.12.6.)호와 관련입니다.

2. 위 대호에 의거 2017 자전거이용도로 유지보수를 위한 기본 및 실시설계 용역의 변경을 위하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경계약 의뢰 개요

○ 용 역 명 : 2017 자전거이용도로 유지보수를 위한 기본 및 실시설계 용역

○ 계약업체 : 변경없음 (㈜ 동일기술공사 대표 김수보)

○ 계약기간 : 변경없음 (당초‘17.3.29 ~ 12.31)

○ 계약금액 : 당초 231,100,000원, 변경후 278,368,236원 (증 47,268,237원)

나. 변경 사유 : 추가과업 시행에 따른 계약금 증액

○ 종로,마포대로,원효대로,천호대로 남단 고산자로 자전거통행량 모니터링

○ 청계천변 자전거전용도로 기본설계 6.8㎞ 추가

붙임 1) 용역 변경시행 방침 1부

2) 변경내역서 1부

3) 합의각서 1부. 끝.

	자전거정책과장
주무관	김수영		자전거시설팀장	代김경진		자전거정책과장	12/07 김성영
협조자
시행	자전거정책과-13602	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	2133-2761	/전송		/		/	부분공개(5)