투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	지하철9호선 3단계건설 시스템분야 전면책임감리용역(3차) 변경계약 의뢰

1. 경리과 계약번호 20161*******01(`17.07.18) 관련입니다

2. 위 호와 관련 우리 본부에서 시행중인 서울지하철 9호선 3단계건설 시스템분야 전면책임감리용역(3차)에 대하여 다음과 같이 설계변경 계약을 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : **********************************

나. 용역개요 : 연장 9.14㎞, 정거장 8개역사(931 ~ 938정거장)

- 위 치 : 송파구 종합운동장 ~ 강동구 둔촌동(보훈병원 앞)

- 범 위 : 지하철9호선연장건설(3단계) 시스템분야시설공사 책임감리

다. 계 약 자 : 세종기술(주) 외 2개사 공동도급(분담이행방식)

라. 용역기간 : 총차(2015. 1. 5 ~ 2018.12.15)

3차(2017. 1. 1 ~ 2017.12.31)

마. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철동건설사업,

도시철도 9호선 3단계건설, 시설비 및 부대비, 감리비

다. 계약금액 : 2,141,000,000원(총차 : 4,540,944,500원)

라. 계 약 자 : 현장전기(주) 이상규 외 1인

마. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업,

도시철도 9호선 3단계건설, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 변경내용

구 분		변경전	변경후	비고
총차	기간	2015. 1. 5 ~ 2018.12.15	변경없음
	금액	2,901,630,000원	변경없음
3차	기간	2017. 1. 1 ~ 2017.12.31	변경없음
	금액	1,004,430,000원	994,794,000원	감 9,636,000원

사. 변경사유

- 추석연휴 임시공휴일 지정에 따라 실감리원 투입인원 정산

붙임 1. 9호선 3단계 시스템분야 전면책임감리(3차) 설계변경 검토 보고. 1부.

2. 9호선 3단계 시스템분야 전면책임감리(3차) 설계변경 내역서 1부.

3. 변경계약 합의서(3차) 1부. 끝.

	도시철도설비부장
주무관	문학준		송변전과장	김영수		도시철도설비부장	12/07 구자훈
협조자	경리과장	최정수
시행	도시철도설비부-14726	(		)	접수		(		)
우	04519	서울특별시 중구 세종대로 125 (태평로1가)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3702-1265	/전송	02-3702-1244	/	namoon@seoul.go.kr	/	대시민공개