＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	「서울숲-뚝도정수센터 간 교환부지 공원조성 공사」 관급자재 납품기한 연기 시행

1. 재무회계과-15182호(2017.11.16.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『서울숲-뚝도정수센터 간 교환부지 공원조성 공사』 와 관련하여 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기를 시행코자 합니다.

가. 관급자재 내역

1) 공 사 명 : 서울숲-뚝도정수센터 간 교환부지 공원조성 공사

2) 계약금액 : 변경 없음

3) 관급자재 : 목재판재(모말라) 외 26종

4) 예산과목 : 최고품질의아리수생산, 깨끗하고안전한아리수생산, 정수장시설유지보수, 수선유지교체비,                   수선유지비(뚝도정수센터서울숲간교환부지공원조성공사)

나. 납품기한 연기

1) 납품기한 연장

○ 당초 : 2017. 12. 15.

○ 변경 : 2018. 03. 15.

2) 납품기한 연기 사유 : 서울숲 – 뚝도정수센터간 교환부지 공원 조성공사 준공기한 연기에 따른                             관급자재 납품기한 연기

붙 임 : 1. 납품기한 연기 보고서 1부

2. 관급자재 내역서 1부.  끝.

주무관	김진명		생산관리과장	한희선		생산부장	12/08 유성종
협조자	주무관	황한범		재무회계과장	박병식
시행	생산관리과-15853	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1314	/전송	02-3146-1319	/		/	대시민공개