투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연장 요청-사천교 성능개선공사(아스콘)

우리 사업소에서 시행중인 ‘사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)’와 관련하여 본공사의 준공기한 연장에 따라 아래와 같이 관급자재(아스콘) 납품기한 연장을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

납품요구번호	물품식별번호	품 명	계약자	계약수량	납품기한		비고
		규 격			당초	변경
12-16-1-44943-00	22535498	아스팔트콘크리트	경기북부아스콘사업협동조합	300톤	2017.12.25	2018.5.30	공기연장에 따른 납품연기
		BB-2, t30mm, 가열, 기층용

끝.

	시설보수과장
주무관	이동섭		주무관	김종성		시설보수과장	12/08 신동헌
협조자
시행	시설보수과-10617	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	02-300-8374	/전송	02-300-8384	/	lds0420@seoul.go.kr	/	대시민공개