아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	서울시설공단이사장(도로관리처)
(경유)
제목	신내3지구 방음벽 설치공사 변경사항 검토 요청

1. 서울주택도시공사 4373(2017.12.1.)호 관련입니다.

2.「신내3지구 방음벽 설치 및 진입도로 개선공사」관련하여 방음벽 설치 공사시행 중 설계도서와 상이한 지장물(상수도관, D2400mm) 발생으로 인한 방음벽 기초 변경 사항(파일형식→역L형옹벽)을 통보하오니 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 방음벽 설치공사 변경 알림 공문 1부.

2. 구조검토서(별도송부).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	서혜지		전용도로팀장	윤병헌		도로시설과장	12/08 박상돈
협조자
시행	도로시설과-14678	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)