투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	준공기한 연기 요청(도시철도 시설물의 효율증대를 위한 정거장 및 기능실 최적화 용역)

1. 도시철도계획부-11979(‘17.12.8.)호와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행중인 『도시철도 시설물의 효율증대를 위한 정거장 및 기능실 최적화 용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용역명 : 도시철도 시설물의 효율증대를 위한 정거장 및 기능실 최적화 용역

2) 계약기간 : 2017. 03. 20. ∼ 2017. 12. 31.

3) 계약금액 : 161,500,000원

4) 계 약 자 : 주식회사 대림 대표 성낙일

나. 준공기한 연기 내역

구분	당 초	변 경	증감
용역기간	2017.03.20.∼2017.12.31	2017.03.20.∼2018.02.28	증)59일

다. 연기사유 : 외부전문가 자문실시 및 관련부서 협의를 위한 준공기한 연기

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	도시철도계획부장
주무관	이선우		경전철설계과장	강명석		도시철도계획부장	12/08 代최병훈
협조자	경리과장	최정수
시행	도시철도계획부-12000	(		)	접수		(		)
우	04520	중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 10층	/
전화	02-772-7147	/전송		/	ssssswwwww@seoul.go.kr	/	부분공개(5)