문서번호	도로관리과-19927
결재일자	2017.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로굴착관리팀장	도로관리과장
엄태용		오석관	12/08 배광환
협조
	주무관		최현

동공탐사용역 과업구간 조정 검토(17-2단계)

2017. 12.

안전총괄본부

도로관리과

동공탐사용역 과업구간 조정 검토

『2017년 노면하부 동공탐사용역(2단계)』추진결과 과업구간 조정이 불가피하여 보고드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2017년 노면하부 동공탐사용역(2단계)

○ 과업내용 : 서울시내 간선도로 540km, 동공 311개소

○ 용역기간 : 2017.7.5. ~ 2018.3.1.

○ 용 역 비 : 881,100천원

○ 계 약 자 : 지케이엔지니어링(주) 대표 고권녀

□ 현   황

○ 전체 62개 탐사노선(탐사연장 540km) 중 13개 노선(연장 58.0km)에서 동공이 하나도 발견되지 않았으며, 3개노선(연장 34.5km)에서 3개의 동공이 발견되는 등 현장여건상 당초 목표(동공수 311개소)를 달성하는데 어려움이 있음

구 분	1차 탐사 (계획 / 탐사 / 분석)	2차 조사 (확인동공)	확인비율 (개소/km)	비고
계	92.51	3	0.0324개/km
13개 노선	58.02	0	0개/km
3개 노선	34.49	3	0.087개/km

○ 만회대책 추진현황

- 6개구 탐사연장 11.7km 재탐사 수행 및 24개소 재분석 및 2차 조사를 통하여 20개소 동공 추가 발견

※ 목표동공수 대비 25개소 부족

□ 검토결과

○ 계약상대자가 요청한 탐사연장 63km를 제공하고 추가탐사에 따른 계약금액 변경없이 과업구간을 조정하고자 함

첨부 : 동공탐사 성과분석 실정보고 1부.   끝.