문서번호	도로관리과-19928
결재일자	2017.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로굴착관리팀장	도로관리과장
엄태용		오석관	12/08 배광환
협조
	주무관		최현

동공탐사용역 구간조정 검토(17-3단계)

2017. 12.

안전총괄본부

도로관리과

동공탐사용역 구간조정 검토 검토보고(17-3단계)

도로함몰 예방사업으로 추진하는 『2017년 노면하부 동공탐사용역(3단계)』 탐사구간이 현장여건(경전철 공사구간 및 교량구간 등)으로 조정이 불가피하여 검토 보고드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2017년 노면하부 동공탐사용역(3단계)

○ 과업내용 : 서울시내 간선도로 465km, 동공 246개소

○ 용역기간 : 2017.9.27. ~ 2018.4.24.

○ 용 역 비 : 671백만원

○ 계 약 자 : 광성지엠(주)

○ 추진현황 : 1차 탐사 262km, 분석 210km, 발견동공 135개소

□ 현   황

○ 당초 계획한 탐사구간에 교량구간과 경전철 공사구간으로 탐사시행이 어려움

□ 검토내용

○ 위 현황과 같이 교량구간, 경전철 공사구간 등 동공탐사가 필요 없거나 탐사가 어려운 구간은 탐사구간에서 제외

○ 탐사구간 제외된 물량만큼 대체구간을 지정하여 탐사 추진

○ 탐사구간 조정계획

당 초				변 경
도로명	차로		탐사연장 (㎞)	도로명	차로		탐사연장 (㎞)
	수	연장			수	연장
계			21.6	계			21.6
용산구 두텁바위로	4	2.4	2.4	마포구 토정로	4	0.4	1.6
성북구 안암로	4	2.8	0.12	성북구 보국문로	4	1	4
서대문구 성산로	8	24	0.18	성북구 아리랑로	5	1	5
마포구 성산로	6	8	5.08	성북구 솔샘로	7	0.3	2.1
양천구 남부순환로	8	21.6	0.72	성북구 솔샘로	4	0.2	0.8
강서구 마곡중앙로	7	9.8	1.05	은평구 은평로	5	0.5	2.5
구로구 오리로	4	6.4	6.4	은평구 은평로	4	0.2	0.8
영등포구 노들로	8	36	3.6	노원구 섬밭로	4	1.2	4.8
동작구 양녕로	4	3.6	0.64
관악구 보라매로	4	2	1.4

○ 탐사구간 노선도

□ 조치의견

○ 상기 탐사구간 조정계획과 같이 탐사구간을 변경하여 시행코자 함.

첨부 : 계약상대자 실정보고 1부.   끝.