＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	계약변경 시행 및 의뢰(암사1정수장 탈수기 제작설치)

우리 부에서 시행 중인 ‘암사1정수장 탈수설비 개량사업’과 관련하여, 아래와 같이 계약사항 변경을 시행 및 요청하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 계약현황

가) 건    명 : ‘암사1정수장 탈수설비 개량공사’ 관급자재(탈수기) 제작구매설치

나) 사업내용 : 고압벨트프레스탈수기 6대 및 컨베이어벨트 1대 교체

다) 계약대상 : 주식회사 유천엔지니어링(대표 문석진)

라) 계약기간 : 2017.05.16. ~ 2017.12.12.

마) 계약금액 : 금1,420,811,000원

바) 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비

2. 계약 변경내역

가) 계약기간 : 변경없음

나) 계약금액 : 증)금37,774,000원(금삼천칠백칠십칠만사천원)

▪ 당초 : 금1,420,811,000원(금일십사억이천팔십일만일천원)

▪ 변경 : 금1,458,585,000원(금일십사억오천팔백오십팔만오천원)

▪ 사유 : 슬러지 자동조절장치(배선, 설치비 포함) 1식 구매

붙임 1. 보고서          1부.

2. 계약변경 합의서 1부.

3. 계약심사 결과서 1부.  끝.

	생산부장
주무관	이상록		기전설비과장	조성태		생산부장	12/08 유성종
협조자	주무관	안정현		주무관	김성민
시행	기전설비과-9325	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1335	/전송	3146-1319	/	rock1975@seoul.go.kr	/	부분공개(5)