문서번호	설비부-20987
결재일자	2017.12.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박기범		代박경철	12/11 권오식
협조

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사』

설계변경 검토보고(총차3회, 2차2회)

2017. 12.

도시기반시설본부

(설비부)

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사』

설계변경 검토보고(총차3회, 2차2회)

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 전기공사』관련 건설사업관리기술단에서 제출한, 경비 정산 및 이전비용을 반영한 설계변경(총차,2차) 건에 대하여 검토 보고함

1		공사현황

▢ 공 사 명 : 도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사

▢ 공사규모 : 연결램프(L=533m, B=5~6m)

가로등 및 신호등 이설 / 램프구간 가로등, 점검등 신설

▢ 공사기간 : 2015. 2. 27. ~ 2017. 12. 29.

(2차: 2017. 3. 07. ~ 2017. 12. 29.)

▢ 도 급 비 : 265백만원

▢ 감 리 단 : 극동엔지니어링㈜ 외 1개사

▢ 시 공 사 : ㈜성강통신기술사사무소

2		관련근거

▢ 전기공사 설계변경도서 제출(총차3최 및 2차2회)

- 극동(감리) 제17-1440호(2017. 12. 08.)

3		설계변경 검토사항

▢ 설계변경 사유 (직접비 증․감 없음)

○ 각종 보험료 및 산업안전보건관리비 정산

○ 이전비용(전기시설부담금, 전기사용료) 반영

▢ 설계변경 내용

○ 총차분 공사 경비 정산 및 이전비 반영 현황                      (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증․감액	비 고
1. 직접공사비	178,009,010	178,009,010	-
2. 공사 경비 정산 (보험료 등)
-건강보험료	1,323,503	-	-1,323,503
-노인장기요양보험료	86,689	-	-86,689
-연금보험료	1,938,542	-	-1,938,542
-산업안전보건관리비	5,186,458	3,960,000	-1,226,458
3. 일반관리비	12,613,815	12,339,303	-274,512
4. 이윤	18,525,932	17,808,116	-717,814
5. 이전비 (시설부담금/전기사용료)	-	3,097,518	3,097,518
부가가치세	24,137,000	23,890,000	-247,000
도급공사비	265,507,000	262,790,000	-2,717,000

○ 2차분 공사 경비 정산 및 이전비 반영 현황                        (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증․감액	비 고
1. 직접공사비	151,801,361	151,801,361	-
2. 공사 경비 정산 (보험료 등)
-건강보험료	1,323,503	-	-1,323,503
-노인장기요양보험료	86,689	-	-86,689
-연금보험료	1,938,542	-	-1,938,542
-산업안전보건관리비	4,427,082	3,200,624	-1,226,458
3. 일반관리비	10,808,870	10,534,358	-274,512
4. 이윤	15,604,207	14,886,393	-717,814
5. 이전비 (시설부담금/전기사용료)	-	3,097,518	3,097,518
부가가치세	20,656,091	20,409,091	-247,000
도급공사비	227,217,000	224,500,000	-2,717,000

▢ 설계변경 현황(총차, 2차)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고 (증·감)
총 차
공사기간	2015. 02. 27.~ 2017. 12. 29.	2015. 02. 27. ~ 2017. 12. 29.	변경없음
도 급 비	265,507,000	262,790,000	-2,717,000
2 차
공사기간	2017. 03. 07.~ 2017. 12. 29.	2017. 03. 07. ~ 2017. 12. 29.	변경없음
도 급 비	227,217,000	224,500,000	-2,717,000

▢ 감리원 검토 의견

- 관련법 규정에 따라 공사 경비(각종 보험료, 산업안전보건관리비)를 정산하고 이전비를 반영하는 내용으로 검토결과 타당하다고 판단됨.

Ⅳ		보고자 의견

▢ 책임감리원의 설계변경 검토내용이 적합한 것으로 판단되어, 설계변경(총차3회, 2차2회) 계약을 의뢰하고자 함.

붙  임  1. 건설사업관리기술단 공문 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.