문서번호	설비부-20965
결재일자	2017.12.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박병환		代박경철	12/11 권오식
협조

『동부간선도로 확장 3공구 통신공사』

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로 확장 3공구 통신공사』

준공기한 연기 검토 보고

『동부간선도로 확장 3공구 통신공사』와 관련하여 선행공정인 토목공사 지연으로 후속공정인 통신공사 시기가 미도래하여 준공기한을 연기 하고자 검토 보고드림.

Ⅰ

관련근거

동엔(발)제2017-2912호(2017.12.08.) 통신공사(1차)공기연장 요청

Ⅱ

공사개요

공 사 명: 동부간선도로 확장 3공구 통신공사

공사규모: 상계주공16단지~의정부시계 간(2.25㎞)

공사내용: VMS이설, 통신케이블공사 등

공사기간: 2017. 04.26. ~ 2018. 12.31(총차)

2017. 04.26. ~ 2017. 12.31(1차)

도 급 비

- ************************************

시 공 사: *********

감 리 사: **********

ⅢⅣ

검토내용

준공기한 연기사유

□ 선행 공정인 토목공사 지연으로 후속공정인 통신공사 시기가 미도래하여 준공기한 연기 필요

공사기간(공사금액 변경 없음)

구 분	차 수	공 사 기 간		비고
		당 초	변 경
통신공사	총 차	2017.04.26.~2018. 12.31	2017.04.26.~2018. 12.31	변경없음
	1 차	2017.04.26.~2017. 12.31	2017.04.26.~2018. 10.31	(증)304일

Ⅳ

감리단 검토

토목공사 지연으로 인해 후속공정인 통신공사의 1차 공사기간 연기가   필요한 것으로 판단됨.

Ⅴ

보고자 의견조치의견

원활한 사업추진을 위해 선행공정 지연에 따른 후속공정인 통신공사의 준공기한(1차)을 연기하는 것이 타당하다고 판단되어 건설총괄부에 계약 변경(준공연기) 의뢰하고자 함.

붙임 : 감리검토의견서 각 1부.  끝.