문서번호	도시철도토목부-16075
보존기간	1년
결재일자	2017.12.11.
공개여부	부분공개(5)

주무관		궤도과장	도시철도토목부장	결재
한재호		최진규	12/11 김진팔
협조
	주무관		조규양

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

설계변경 자문 (소)위원회 개최 결과보고

2017. 12.

도시기반시설본부

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

설계변경 자문 (소)위원회 개최 결과보고

하남선(5호선 연장) 11공구 설계변경에 따른 계약금액 조정에 대한 적정성 여부 검토를 위한 설계변경 자문 (소)위원회 개최 결과보고임.

※ 관련문서 : 하남 제17-1106호(2017.12.07.)

1		관련근거

○ 설계변경 자문회의 운영 개선방침 : 본부장 방침(토목부-23478, `13.12.17)

○ 설계변경 자문회의 운영 일부개정 : 주요 현안사항 보고(시장 업무보고 `15.03.02)

2		설계변경 (소)위원회 개최 현황

○ 일    시 : 2016.12.06.(수) 14:30

○ 장    소 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 현장사무실

○ 자문안건 : 6건 1,779,210천원

- 본선1구간 사토장 추가 선정                : (증)222,000천원

- 본선1구간 지장폐기물 처리                 : (증)661,410천원

- 본선1구간 철도운행안전관리자 배치       : (증) 89,800천원

- 현장 발생암(풍화암) 반출 변경             : (증)537,000천원

- NTR구간 강관압입 본당 길이 변경          : (증) 92,000천원

- 비개착터널(NTR) 외부전문가 조치사항 반영 : (증)177,000천원

○ (소)위원회 구성

- 위 원 장 : 최진규 궤도과장

- 간    사 : 조규양 주무관

- 외부위원 : 황효석(건화엔지니어링), 채종근(921공구 감리단장), 장준혁(하남선1-2공구 감리원)

- 내부위원 : 김근수, 이경훈 주무관

- 관 계 자 : 건설사업관리기술자, 현장소장 등

3		개최결과

○ 위원회 자문결과

자문대상	조 치 사 항
	원안가결	조건부가결	부결/반려
6건	4건	2건	-

○ 세부 자문내용

구 분	자문의견 및 조치현황		자문결과
본선1구간 사토장 추가 선정	자문 의견	- 거리, 토사종류 변경된 사항에만 신규단가 적용 - 공차·실 중량 운반거리 속도에 대한 근거 명시	원안가결
	조치 현황	- 근거자료 첨부 완료
본선1구간 지장폐기물 처리	자문의견	- 폐기물 증가부분에 따른 사토처리 감액 처리 - 폐기물 형상별 구분 및 산정 필요	원안가결
	조치 현황	근거자료 첨부 완료 폐기물 반출 완료 후 사토량 정산 예정
본선1구간 철도운행안전관리자 배치	자문의견	- 일일 근무시간 기재 요망 - 야간 할증 적용시 시간대별 할증률 검토	원안가결
	조치 현황	- 근거자료 첨부 완료
현장 발생암(풍화암) 반출 변경	자문의견	- 현장 암판정 여부 확인	원안가결
	조치 현황	- 암판정 시행자료 첨부
NTR구간 강관압입 본당 길이 변경	자문의견	- 마감벽부 피스브라켓 및 띠장 길이 검토	조건부가결
	조치 현황	- 피스브라켓(6개소→3개소), 띠장 길이(4m)로 수정
비개착터널(NTR) 외부전문가 조치사항 반영	자문의견	- H형강 및 앵글 손료 및 고재처리 반영	조건부가결
	조치 현황	- 고재처리 반영 완료

4		조치결과

(단위 : 천원)

연번	자 문 안 건	유형	자문요청금액 (A)	절감액 (B)	최종반영금액 (C=A-B)
1	본선1구간 사토장 추가 선정	⑩	222,000	-	222,000
2	본선1구간 지장폐기물 처리	⑩	661,410	-	661,410
3	본선1구간 철도운행안전관리자 배치	⑩	89,800	-	89,800
4	현장 발생암(풍화암) 반출 변경	⑩	537,300	-	537,300
5	NTR구간 강관압입 본당 길이 변경	⑩	92,000	1,000	91,000
6	비개착터널(NTR) 외부전문가 조치사항 반영	⑩	177,000	2,000	175,000
계			1,779,510	3,000	1,776,510

※ 설계변경 유형 :  ① 정책, 계획 등 사업계획 변경   ② 민원해결, 보수, 보강   ③ 문화재 및 지장물 이설

④ 현장여건 상이 ⑤ 유지관리, 사용부서 요구   ⑥ 설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

⑦ 공법변경   ⑧ 제도, 기준변경  ⑨ 유관기관 사전협의 미흡   ⑩ 기타(계약내용변경)

5		관리단 검토의견

○ 자문의견에 대한 조치결과를 검토한 결과 적정한 것으로 판단되며, 절감액(3,000천원)에 대하여 감액조치하고 설계변경 반영함이 타당할 것으로 판단됨.

6		조치의견

○ 상기 보고내용의 설계변경 자문 소위원회 조치결과는 건설사업관리단 검토의견과 같이 승인하고, 조속히 설계변경(준공)을 시행하고자 함.

- 공사비 변경 : [당초]1,779,510원 ⇒ [변경]1,776,510 / [절감액]3,000천원

붙 임 : 관리단 공문 및 검토의견서 1부.