문서번호	설비부-20918
결재일자	2017.12.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	12/11 권오식
협조

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기공사/통신공사』

준공기한 연기 검토보고

2017. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기공사/통신공사』

준공기한 연기 검토보고

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 공사 』선행공종인 토목공사의 준공기한 연기 (`17.12.31→`19.12.31)에 따라 전기공사 및 통신공사 준공기한 연기하고자 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사

□  위    치 : 종로구 창덕궁 돈화문 ~ 원남동 사거리

□  규    모 : 도로확장 4차로→6차로, 터널 300m

□  시 공 사 : **************************

□ 공사금액 : **************************

□ 공 정 률 : 20%(전기,통신)

2		관련근거

□ 건설사업관리단 “준공기한 연기 검토보고” (율곡감 제2017-271,273호)

3		준공기한 연기내용

□  사 유 : 선행 공정인 토목공사의 준공기한 연기 (`17.12.31.                →`19.12.31.)에 따라 전기공사, 통신공사 순연

□  연기내용

구분	계약자	계약금액	준공기한(납품기한)
			당초	변경
전기공사	*********	**************	`17.12.31	`19.12.31
통신공사	*******	************	`17.12.31	`19.12.31

※계약금액 변경없음, 지체상금 미부과

4		보고자 의견

□   선행 공종인 토목공사의 준공기한 연기에 따라 후속공종인 전기공사, 통신         공사의 준공기한을 연기하여 공사시행에 차질이 없도록 하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리단 공문 2부. 끝.