투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	9호선(3단계) 2구간 정보통신공사(총차,제3차) 설계변경 시행 및 계약의뢰 재송부

1. 조달청 계약번호 14120629(‘14.12.31.)호, 도시철도설비부-14819(‘17.12.08)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 2구간 정보통신공사(총차, 제3차)의 조달청 물가변동 조정검토서(‘18.12.08)를 반영하여 설계 변경서를 재송부하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 2구간 정보통신공사(총차, 3차)

나. 계 약 자 : (주) 일광기업 오도진

다. 계약기간 : ‘14.12.31 ~‘ 18.01.12

라. 설계변경 및 계약기간 변경 내용

구 분	설계변경금액			계약기간 변경		비 고
	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경
총차	5,609,316,940	6,404,534,000	증 795,217,060	‘14. 12. 31 ∼ ’18. 01. 11	‘14. 12. 31 ∼ ’18. 12. 30
1차	210,000,000	210,000,000	-	‘14.12.31~ ‘15.12.10		기준공
2차	735,000,000	735,000,000	-	‘15.11.23~ ‘16.12.02		기준공
3차	3,594,000,000	3,594,000,000	(내역변경)	‘16. 10. 21 ∼ ’17. 12. 30		준공예정
향후	1,070,316,940	1,865,534,000	증 795,217,060

따로붙임  1) 설계변경 내역서(총차) 1부.

2) 물가변동(3차) 검토의견서 1부. 끝.

	도시철도설비부장
주무관	배종수		정보통신과장	추경수		도시철도설비부장	12/11 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-14868	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7320	/전송	772-7308	/	baejs@seoul.go.kr	/	부분공개(5)