문서번호	도로보수과-13082
결재일자	2017.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박성근		김권일	12/11 김용제
협조
	주무관		김경욱

2017년 자전거도로 유지보수 1,2단계 사업(노면표시)

작업완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12

강서도로사업소

(도로보수과)

자전거도로 유지보수 1,2단계 사업(노면표시) 작업완료 보고

□ 관련근거

○ 2017년 자전거도로 유지보수 1단계 사업 시행계획 보고

【도로보수과-7254호(‘17.7.12.)】

○ 17년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 설계변경 검토보고(제2회)

【도로보수과-9124호(‘17.8.29.)】

○ 2017년 자전거도로 유지보수 2단계 사업 시행계획 보고

【도로보수과-11916호(‘17.11.10.)】

○ 17년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 설계변경 검토보고(제3회)

【도로보수과-12205호(‘17.11.20.)】

□ 사업개요

□ 자전거도로 유지보수 1단계 사업

○ 사업기간 : 2017.08.29.~2017.10.27.

○ 개선내용

- 노면표시 제거 및 도색(차선·문자·기호, 자전거횡단 실·파선, 안전지대 등)

○ 위    치 : 영등포구 남부교육청앞 교차로외 3개소(붙임 준공도면 참조)

○ 사 업 비 : 10,750천원

○ 예산과목 : 교통사업특별회계, 자전거정책과, 자전거이용시설 확충 및 관리, 자전거도로 유지보수, 시설비(401-01)

□ 자전거도로 유지보수 2단계 사업

○ 사업기간 : 2017.11.24.~2017.12.08.

○ 개선내용

- 노면표시 제거 및 도색(차선·문자·기호, 자전거횡단 실·파선, 횡단보도 등)

○ 위    치 : 구로구 거리공원 오거리외 4개소(붙임 준공도면 참조)

○ 사 업 비 : 67,491천원

○ 예산과목 : 교통사업특별회계, 자전거정책과, 자전거이용시설 확충 및 관리, 자전거도로 유지보수, 시설비(401-01)

□ 작업완료 보고(정산)

□ 자전거도로 유지보수 1단계 사업

○ 작업 물량내역(노면)

사 업 명	당 초		변 경		증·감	비 고
자전거도로 유지보수 1단계 (영등포구 남부교육청앞 교차로 외 3개소)	도 색	238m	도 색	229m	감) 9
	제 거	284m	제 거	281m	감) 3
	밑그림	238m	밑그림	0m	감) 238
	표지병		표지병	2개	증) 2

- 보고내용

1) 현장작업 물량차이 발생 및 “차로 밑그림” 작업(L=238m) 제외(예산낭비 방지)

2) 사업구간내 기 설치된 도로표지병 철거(2개)

- 정산금액

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	2,145천원	2,131천원	감) 14천원
관 급 비	251천원	278천원	증) 27천원
총 공사비	2,396천원	2,409천원	증) 13천원

※ 당초 도급금액은 17년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 설계변경(제2회)시 적용한 노면표시 계약단가 금액이며, 추가 구매한 특수페인트(관급자재) 단가변동 금액 반영

□ 자전거도로 유지보수 2단계 사업

○ 작업 물량내역(노면)

사 업 명	당 초		변 경		증·감	비 고
자전거도로 유지보수 2단계 (구로구 거리공원외 4개소)	도 색	5,001m	도 색	3,631m	감) 1,370
	제 거	5,543m	제 거	3,741m	감) 1,802
	밑그림	5,001m	밑그림	3,511m	감) 1,490

- 보고내용

1) 실시설계 내역상 물량과 현장작업 물량차이 발생【실시설계 과다 설계】

2) 노면작업의 연속성 확보(타 시책사업 및 신호기 설치공사)를 위해 교차로 구간 횡단보도에 대해 “차로 밑그림” 작업(L=3,511m) 시행

3) “시흥 IC”구간 문자 및 기호 표시는 남부도로사업소에서 작업완료하여 작업 제외(강서도로사업소와 경계구간)

- 정산금액

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	50,325천원	34,729천원	감) 15,596천원
관 급 비	5,921천원	4,321천원	감) 1,600천원
총 공사비	56,246천원	39,050천원	감) 17,196천원

※ 당초 도급금액은 17년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 설계변경(제3회)시 적용한 노면표시 계약단가 금액이며, 추가 구매한 특수페인트(관급자재) 단가변동 금액 반영

□ 검토결과 및 조치계획

○ 위 보고내용 같이 현장여건변화 및 물량조정 등을 포함하여 적합하게 완료하였기에 추후, 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 최종설계 변경시 정산(도급비, 관급비)처리코자 함.

붙 임  1. 작업 완료 내역서 각 1부.

2. 준공도면 및 사진대지 각 1부.  끝.