투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기요청 (월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역)

우리부에서 시행 중인 ‘월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역’에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명: 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역

2. 용역규모: 연결로 5개소, 지하차도

-  남단IC 연결로(폭 1차로): 교량 및 교각 형식 검토

-  강남방향 연결로(폭 1차로): 접속방법 개선(지하차도 → 교량)

-  접속교: 연결로 신설 및 변경에 따른 종단선형 검토

3. 용 역 사: (주)동일기술공사

4. 용역금액: 917,600,000원 (변경없음)

5. 변경사항: 용역기한 변경

구 분	당 초	변 경	증·감
보완설계	2017. 8. 7. ~ 2017. 12. 31.	2017. 8. 7. ~ 2018. 3. 31.	증)3개월

6. 예산과목: 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충(도시개발특별회계), 월드컵대교건설, 시설비 및 부대비, 시설비

7. 연기사유: 관련기관 협의의견 반영 및 행정절차 이행기간이 필요하여 준공기한 연기

8. 지체상금 부과 여부: 미부과

붙임  1. 용역기간 변경요청 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기 검토보고 1부.  끝.

	토목부장
주무관	김동수		토목설계과장	여용석		토목부장	12/11 김영수
협조자
시행	토목부-25875	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2587	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(6)